의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-22347
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		교량건설과장	토목부장	시설국장		결재
김동현		이동훈	노우성	10/26 형태경
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 91번, 오봉수의원, 도시안전건설위원회)

시의원 요구자료를 따로붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙  임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

오봉수 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

91. 목동교 성능개선공사

1) 사업개요(목적, 위치, 규모, 사업기간, 총사업비, 계획공정율, 현재 공정율,

계획대비 실공정율)

2) 가설교량 설치 차수별 설치 일자

3) 가설교량에 대한 정기안전점검 및 정밀점검실시 관련

‧ 횟수별 정기안전점검 및 정밀점검 내역[점검일자/점검기관/점검내용/점검부위/점검방법/지적사항/조치사항/비고]

‧ 정밀점검 비용 및 정산내역

1) 사업개요(목적, 위치, 규모, 사업기간, 총사업비, 계획공정율, 현재 공정율,

계획대비 실공정율)

○ 사업목적

- 경인고속국도(경기, 인천지역)와 서울 여의도를 연결하는 국회대로상에 위치한 중차량 노선상 시설물인 목동교(구교)에 대하여 성능개선(DB18→DB24)을 통하여 시설물의 안전성 확보 및 원활한 물류 이동 도모를 통한 중차량 통행 민원 해소

○ 위    치 : 양천구 목동 919-1 ~ 영등포구 양평동 57

○ 규    모 : 교량 성능개선 폭 20m, 연장 240m(DB-18 → DB-24)

○ 사업기간 : 2015년 09월 ~ 2017년 08월

○ 총사업비 : 15,106백만원

○ 계획공정율 :  2%

○ 현재공정율 :  2%

○ 계획 대비 실공정율 : 100%

2) 가설교량 설치 차수별 설치 일자

○ 1차(2015.10.21. ~ 12.31)

- 가설교량 본선부 하부공 및 상부공

- 가설교량 램프부 하부공

○ 2차(2016. 1월 ~ 3월)

- 가설교량 램프부 상부공

3) 가설교량에 대한 정기안전점검 및 정밀점검실시 관련

○ 횟수별 정기안전점검 및 정밀점검 내역[점검일자/점검기관/점검내용/점검

부위/점검방법/지적사항/조치사항/비고]

- 정기안전점검 : 점검계획 수립중

가. 점검일자 : 점검예정(전체 3회)

나. 점검기관 : 외부업체(추후 선정)

다. 점검내용

․ 안전관리계획서 작성내용 검토

․ 가설공법의 계획 및 공법적용의 적합성

․ 구조계산서 및 설계관련도서 검토

․ 현장 시공상태 조사(규격, 변위여부 및 철골부재 용접부(해당시),

규격, 기타시공상태)

라. 점검부위 : trias부, 가로보, 수직재, 상하부 플랜지 가교 접속부 등

마. 점검방법 : 관계서류 검토확인, 육안확인, 계측확인

바. 지적사항 : 해당사항 없음

사. 조치사항 : 해당사항 없음

- 정밀점검실시 : 해당사항 없음

○ 정밀점검 비용 및 정산내역

- 점검비용 : 21백만원(정기안전점검).

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	이동훈
	☎ 3708-2576	주 무 관	김동현
	작 성 일 : 2015.10.