의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-22343
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	건설총괄부장

주무관		교량건설과장	토목부장	시설국장		결재
김동현		이동훈	노우성	10/26 형태경
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 36번, 김진영 의원. 도시안전건설위원회)

시의원 요구자료(요구번호 36번)를 따로붙임과 같이 제출코자 합니다.

붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

김진영 의원(도시안전건설위원회, 새누리당)

36. 동부간선도로(월계1교~의정부시계) 확장공사 관련

1) 사업개요 및 추진현황(목적, 위치, 규모, 사업기간, 추진경위 등)

2) 총사업비 및 재원 부담내역

3) 연도별 예산편성 및 집행내역(세부공정별 구분)

4) 공사착공 이후 현재까지 발생한 민원현황(민원제기일자/민원인/민원내용/

조치사항)

5) 사업계획변경 조정위원회 심의별 심의내용 및 심의 이후 진행현황

6) 사업계획변경 조정 이후 증가되는 총사업비 현황

7) 당초 설계 대비 변경사항 세부내역, 사유, 증감금액

1) 사업개요 및 추진현황

○ 목  적

- 서울시 동북부지역의 간선도로인 동부간선도로 중 현재 왕복 4차로로 운영중인 월계1교~의정부 시계간을 왕복 6차로로 확장함으로써 병목으로 인한 상습정체 해소 및 간선도로망 구축

○ 위  치 : 노원구 월계 1동 ~ 의정부시계

○ 규  모 : 폭 4 → 6차로, 연장 6.85km (서울시 1.4km, 광역도로 5.45km)

- 지하차도 5개소 3,372m(초안산, 녹천, 도봉, 상도, 장암)

- 옹벽(5,002m) 및 보도육교 1개소(상일) 설치 등

○ 사업기간 :‘07. 10. ∼ ’17. 12.

○ 사업 추진경위

공구별	추진경위	비고
1공구	- 월계1교 U-TYPE(양방향)확장 완료(2차로→3차로) - 경원선 철도이설에 따른 공사일시중지('12.1 〜 '16.12) - 경원선 철도 이설공사 추진 중[‘15. 9월기준, 공정율 75%]
2공구	- 도봉지하차도(총연장1,900m, 1〜7단계 분할시공) 1∼5단계 (일부 포함) 1,270m 완료 - 도봉지하차도 5,6단계(330m) 시공중 (7단계 구간 300m-‘16. 10월 시공예정) 녹천지하차도 저촉 상수도 882m 이설 완료
3공구	- 상도지하차도 및 상일보도육교 설치 완료, 제외지 옹벽 1,367m 시공 - 방음벽 754m완료, 장암지하차도 270m 시공중

2) 총사업비 및 재원분담 내역

(단위 : 백만원)

구 분	계	광역구간	재정구간	비 고
총사업비	383,470	269,808	113,662
국 비	62,128	62,128	-
시 비	276,342	172,680	103,662
기 타	45,000	35,000	10,000	교통개선분담금

3) 연도별 예산편성 및 집행내역

○ 예산편성 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	2013년이전	2014년	2015년	2016이후	비고
계	383,470	193,865	60,400	50,620	78,585
시 설 비	309,543	154,650	47,850	36,100	70,943
감 리 비	8,754	6,525	1,000	500	729
부대비(수탁비)	65,173	32,690	11,550	14,020	6,913

○ 집행내역 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013년이전	2014년	2015년(9.30기준)	비고
계	143,517	29,759	24,264
시 설 비	105,328	17,243	9,501
감 리 비	5,635	970	755
부대비(수탁비)	32,553	11,546	14,008

4) 공사 착공 이후 현재까지 발생한 민원현황(일자, 민원인, 민원내용, 민원 처리

결과 등) : 별첨 1

5) 사업계획변경 조정위원회 심의별 심이내용 및 심의 이후 진행현황

○ 심의내용 : 제2차 사업계획변경 조정위원회(2015.7.23.)

①  녹천~도봉간 지하화 연장 : 지하차도 L=2,380m → L=2,980m(증 600m)

※ 공사비 : 당초 1,894억원 → 변경 2,724억원(증액 : 830억원)

- 심의결과 : 적정

‣ 사업비용 증액에 따른 시 재정 여건을 감안하여 공사기간 조정(연장

조정) 검토 필요

② 상계현대 2차APT~수락고가 구간 방음벽 형식 변경 : 적정

- 꺽기형(H=6m+2.0~5.5m) 900m → 터널형 646m, 장대꺽기형(H=6m+12.5m) 254m

※ 공사비 : 당초 623억원 → 변경 776억원(증액 : 153억원)

- 심의결과 : 적정

‣ 터널형 방음벽 구간에 대해서는 과다 설계가 되지 않도록 소음에 대한    시뮬레이션과 소음기준 등을 종합적으로 고려하여 적합한 방음벽 형식    결정 필요

‣ 터널형 방음벽’으로 명칭할 경우 완벽한 소음 차단시설로 인식할 수    있어, 향후 도심지내 고속화도로 주변 주민들이 발생소음 규모에 비해    과도한 설치를 요구할 수 있으므로 명칭에 대한 개념 정의 필요

③ 설계변경시 보완설계 용역의 계약방법 : 별도 검토하여 결정

- 안건 성격상 사업계획변경조정위원회에서 다룰 사안이 아니므로, 계약부서 등과 협의하여 별도 결정

○ 심의이후 진행 현황

-‘15.8.17/21 : 방음벽 형식변경 주민설명회 개최(안철수국회의원, 구청장, 시,구의원)

‣ 수락리버시티아파트 터널형 방음벽 및 기타 전 구간 터널형 요구

-‘15.  9.14 : 동부간선도로확장공사 사업추진계획 변경통보(도로계획과)

-‘15.  9.14 : 동부간선도로확장공사 사업추진계획 변경통보(도로계획과)

-‘15.  9.24 : 도봉지하차도 지하화 연장 및 방음벽 변경 시행계획 보고(본부)

-‘15. 10.15 : 방음벽 기본설계 및 디자인 공모 이행 추진

-‘15. 10.20 : 총사업비 및 공사기간 변경 관련 기획재정부 및 국토부 협의

6) 사업계획변경 조정 이후 증가되는 총사업비 현황

(단위:백만원)

총사업비	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
	385,038	488,161	증1,031
사업기간	2004년 ~ 2017년	2004년 ~ 2019년	2년연장

7) 당초 설계 대비 변경사항 세부내역, 사유 증감금액

연번	공사명	설계 변경내용	설 계 변 경		도 급 액(백만원)			비고
			경 위	사 유	당초	변경	증· 감액
1	동부간선도로확장공사 (2공구)	- 녹천대형상수관로이설 - 창동~도봉 지하화 설계변경 - 건축관리동 규모변경 - 지장물 매달기 - 지장물 이설 - 지층선 변경 반영 - 지상구간 방수공법 변경 - 4호선 교각보호공 반영 - 물가변동액 조정 외	1차(09.12.24) 2차(10.02.26) 3차(10.06.04) 4차(10.12.28) 5차(11.09.18) 6차(11.12.28) 6-1차(12.11.28) 7차(12.12.27) 8차(13.07.26) 9차(14.02.25) 10차(14.06.27) 11차(15.02.17) 12차(15.09.16)	1.지장수목이식및도봉1단계시공 관련변경외 2.도봉1단계암선변경외 3.녹천지하차도대형상수관로이설외 4.지장수목이식및도봉2단계시공 관련변경외 5.물가변동반영(K1,K2)외 6.도봉3단계시공관련 변경외 6-1.공기연장 7.도봉~창동 지하화변경 8.건축관리동규모변경외 9.지장물매달기및이설외 10.사토운반거리변경외 11.도봉5단계시공관련 변경 외 12.도봉6단계시공관련 변경외	88,232	174,721	86,489
2	동부간선도로확장공사 (3공구)	물가변동 및 현장여건 실정보고 반영	1차(08.12.22) 2차(09.01.13) 3차(10.01.19) 4차(10.10.13) 5차(10.12.30) 6차(11.10.21) 7차(12.02.24) 8차(12.12.10) 9차(13.10.04) 10차(13.12.31) 11차(14.09.02) 12차(15.02.12)	1.물가변동, 현장여건반영 2.물가변동 3.현장여건변경 4.현장여건변경 5.현장여건변경 6.물가변동,현장여건변경 7.현장여건변경 8.물가변동, 현장여건변경 9.방음벽변경 10.현장여건변경 11.현장여건변경 12.현장여건변경	41,900	57,594	15,694

끝.

작성자	기관명 (부 서 명)	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토 목 부)	담당사무관	이동훈
	☎ 3708-2576	주무관	김동현
	작 성 일 : 2015. 10. 26.