문서번호	시설보수과-6033
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
조장호		박용선	10/26 代김현수
협조
	주무관		나철흠

정밀점검용역 자문회의 개최결과 보고

-삼성교외 7개소 정밀점검 용역-

동부도로사업소

(시설보수과)

정밀점검용역 자문회의 개최결과 보고

우리 사업소에서 수행중인 삼성교외 7개소 정밀점검용역에 대한

최종보고 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1		용역현황

❍ 용역개요

용 역 명	대상시설물	용역기간	용역업체	용역비
삼성교외 7개소 정밀점검용역	삼성교,대곡교,헌릉교 가락지하차도,잠실호수교,장지1교,오륜교,상일2교	‘15.05.19. ~11.14	㈜세안 안전진단	100,348천원

2		개최현황

❍ 일    시 : 2015. 10. 20(화) 14:00 ~

❍ 장    소 : 동부도로사업소 회의실(2층)

❍ 참여위원

연번	구 분	소 속	직 위	비고
1	위원장	동부도로사업소	소 장	임 대 성
2	외부 위원	㈜삼림엔지니어링	이 사	이 승 수
3		동일기술공사	부 사 장	최 장 환
4		㈜대신 이엔지	대표이사	하 상 우
5	내부 위원	교량관리과	교량관리팀장	유 제 천
6		동부도로사업소	도로보수과장	김 환 겸

３		자문내용

❍ 이 승 수 위원

1. 대곡교,삼성교등 신축길이 오기 확인 필요

2. 헌릉교 교량형식은 슬래브교 규정을 적용하여 상태평가 시행

3. 오륜교 박리현상 위치표기 확인 필요

4. 0.3mm이상 신규 균열에 대한 원인분석을 면밀히 검토하여 서술

5. 하부공간은 구조적 손상이 아니더러도 보수 우선순위 반영

❍ 최 장 환 위원

▶ 공통사항

1. 교량 현황표 통일되게 작성하고 시공사와 용역사 필히 표기

2. 탄산화 깊이보다 염화물 함유량 조사 실시를 건의

3. 내진성능 검토 수행여부 확인하여 표기

4. 부재별 가중치 적용기준 재검토 및 결함도 점수 재산정

▶ 삼성교

1. 상태평가 가중치 재산정 검토

2. 연단거리 측정결과 만족여부 표기

3. 탄산화 깊이 측정 재검토

4. 보수보강순위 일부조정 필요

▶ 대곡교

1. 교량기초형식 구체적으로 기재

2. 형하 여유고 관리여부 제시

▶ 가락지하차도

1. 통과높이 재검토

2. 지하차도 배수시설물 누락 재검토

▶ 잠실호수교

1. 콘크리트 비파괴 시험 추가조사 건의

2. 잠실롯데월드 주변공사후 시행될 예정인 보수보강에 대해 공사비와 상관없이

우선순위 부여하여 관리

▶ 헌릉교

1. 교통통제비용 산출근거 명시

▶ 장지1교

1. 기초 강관파일을 PC파일로 수정

2. 콘크리트 비파괴 시험 추가조사 건의

▶ 오륜교

1. 신규결함 물량표 연번 누락 표기바람

❍ 하 상 우 위원

▶ 공통

1. 손상유발 원인에 대한 분석 미흡

▶ 삼성교

1. 바닥판 두께 27cm에 대한 근거 및 위치 표기

2. 보수부위 재손상에 대해 단면보수인지 표면처리인지 구분, 어떤 재료로 언제

재손상이 발생된는지 분석후 재손상이 발생되지 않는 방안 제시

3. 보도부 하면 손상은 상면의 상태와 연계하여 분석

4. 거더부 누수백태 현상은 바닥판 손상으로 구분

5. 교좌면에 적치된 폐콘크리트는 그 발생부위에 대한 현 상태를 조사 분석

조치여부 판단

6. 상태평가 결함지수가 C등급에 근접하고 있어 금회 적극적인 보수가 시행될수

있도록 조치가 필요

▶ 대곡교

1. 신축이음장치의 전체교체 또는 부분교체에 대한 정확한 의견 제시

2. 신교 포장의 망상균열 원인에 대한 재 분석

▶ 잠실호수교

1. 신축이음장치 후타재 교체만 가능한지 여부 제시

▶ 가락지하차도

1. 포장부 포트홀의 원인을 불건전부를 통한 지하수 유출로 제시한 근거 및

대책으로 유도배수관 설치 가능 여부

❍ 유 제 천 위원

1. 보수시설물에 대한 원인분석 미진 및 보수방안 구체적 제시

2. 표면보수는 지양하고 구체를 강화하는 방안 제시

3. 헌릉교는 교량확장공사 예정이므로 긴급보수 물량 위주로 산출

4. 장지1교 소형변형은 중층까지 개량 하는것을 검토

5. 가락지하차도 누수원인 재분석하여 보수방안 제시

❍ 김 환 겸 위원

▶ 공통

1. 요약문 작성하여 보고서 첨부

2. 보고서별 형식 통일(글자체,표형식등)

▶ 삼성교

1. 신축이음 이동량 산정시 강교기준을 적용

▶ 대곡교

1. 구교 교각의 기초 노출이 현장조사 및 시험과 시설물 평가에 반영되지 않음

2. 대곡교 구교에 대한 상부구조의 손상물량은 하자보수로 시행

▶ 가락지하차도

1. 등급하향 원인을 보고서에 추가

3		조치의견

❍  자문위원이 제시한 의견을 용역수행 최종 보고서에 검토 반영토록

정밀점검용역 업체인 ㈜세안안전진단에 통보하여 용역수행에

만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 1. 자문위원 참석현황 1부.

2. 자문회의 현황사진 1부.

3. 자문위원 의견서 1부.끝.