문서번호	기전과-11221
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
호정오		윤석주	10/26 代윤석주
협조

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 1차 2회)

실정보고사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

서부도로사업소

(기 전 과)

교통신호기 신설 및 보수공사(2지역 1차 2회)

실정보고사항 검토보고

교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역 1차) 업무수행 중에 책임감리가 제출한 1차 작업지시 2회 실정보고에 대하여 검토하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 책임감리 실정보고(영호이앤씨 영호 본 15-10-10호, ‘15.10.21)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가-2지역)

○ 공사위치 : 서부도로사업소 관내(마포구, 은평구)

○ 공사규모 : 교통신호기 신설 및 보수 1식

○ 계약금액 : 691,000,000원

○ 공사기간 : 2015.3.4. ∼ 2015.12.31.

○ 계약업체 : ㈜대덕 대표 이흥숙

□ 1차 작업지시개요

○ 작업위치 : 은평구 은평제일교회 외 38개소

○ 작업지시금액 : 585,244,000원

○ 작업지시기간 : 2015.3.19. ∼ 2015.10.30.

□ 실정보고 내용

○ 변경예상금액 : 감 76백만원(585백만원 → 538백만원 → 462백만원)

○ 세부내역

- 마포구민회관 : 감 2백만원

․2015년 도로교통 소통개선사업과 중복으로 제외

- 상암어린이집 : 감 1백만원

․교통정보과 광케이블 미신설로 제외

- 공덕1동주민센터 : 감 6백만원

․도로굴착허가 조건이 원인자복구로 공종 및 물량 반영

․조가선없는 지주 시범설치로 지주 및 부착대 사급에서 관급으로 물량 변경

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 희성교회 : 감 2백만원

․도로굴착허가 조건이 원인자복구로 공종 및 물량 반영

․지주 기초설치 위치에 지장물(하수관)로 설치가 불가하여 통합지주(차량/        보행)설치로 물량 변경

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

- 서강엘지아파트 : 증 1백만원

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

- 구산중학교 : 증 4백만원

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

․지주 이설시에 케이블 거리가 짧아져 케이블 재설치에서 교체로 물량 반영

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 구산역 : 증 1백만원

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

․지주 이설시에 케이블 거리가 짧아져 케이블 재설치에서 교체로 물량 반영

․가로등주에 보행등 통합설치에 따른 물량 변경

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 신사1동주민센터 : 증 1백만원

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

․노후 케이블 및 노후 제어기 추가 교체로 재설치에서 교체로 물량 반영

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 녹번동평화교회 : 증 1백만원

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 신사오거리 : 증 29백만원

․절연불량의 케이블 재설치에서 추가 교체로 물량 변경

․관로 미선통으로 굴착 및 배관 물량 반영

․누락된 1개소 연동지점 노후 지주 및 노후 케이블 추가 교체 물량 반영

․조가선, 애자 및 밴드로 설치변경에 따른 공종 및 물량 변경

․당초 설계와 상이한 사항을 현장여건에 맞도록 공종 및 물량 변경

- 창전삼거리 : 감 102백만원

․재개발 예정지역으로 추후 원인자공사가 예정되므로 공사 제외

※ 붙임 세부 실정보고 참조

□ 조치의견

○ 감리업체 실정보고 내용이 타당하므로 감리업체에 우선 변경하여 작업토록 지시하고 추후 완료보고 시에 정산물량 반영하고자 함

붙 임 : 책임감리 실정보고 1부.  끝.