문서번호	시설보수과-4104
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
고흥일		代정규용	10/26 代송재우
협조

누수유도차단 장치 등 2차 작업지시 관련 실정 보고 검토

(노들북고가외 3개소 보수공사)

2015. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

누수유도차단 장치 등 2차 작업지시 관련 실정 보고 검토

우리사업소에서 시행중에 있는 『노들북고가외 3개소 보수공사』의 노들북고가 누수유도차단장치 및 방호벽 차수조인트 등 2차 작업지시 관련 실정 보고 사항에 대한 검토 보고임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들북고가외 3개소 보수공사

○ 공사기간 : 2015. 6. 24 ~ 2015. 12. 20.

○ 공사개요 : 노들북고가 (교면방수및포장 17a, 신축이음후타재보수 71.5m)

도림고가 (방음벽교체 132m), 봉림교(교면방수및포장 20a)

잠수교남측지하차도 (캐노피2개소, 방호울타리 81경간)

○ 도급금액 : 756,900천원

○ 도 급 자 : 케이탑건설(주) 대표 김길선

○ 감 독 청 : 서울특별시 시설관리공단 (공사감독1처 김윤기)

□ 시설관리공단 실정보고 및 검토 내용

【 관련공문 : 시설관리공단 공사감독1처-9748 (2015.10.23)호 】

가. 현    황

○ 노들북고가의 누수유도 차단장치 및 방호벽 차수 Joint 설치에 대한 실정 보고 임.

나. 보고내용

○ 노들북고가의 신교와 구교 사이 공간(b=40cm)으로 우천시 빗물이 방호벽을 타고 교량 하부로 유입, 하부구조물의 내구성 저하에 영향을 미칠 우려가 있어, 누수 유도차단장치를 설치하라는 발주청 지시가 있음.

○ 또한, 교량 신축이음부 방호벽 난간에 기 설치된 방호벽 차수 조인트가 노후되고 파손되는 등 제기능을 하지 못해 재설치 지시가 있음.

다. 개략 공사비 현황

(단위:원)

공 종 명	수량	단위	공사비 현황			비고
			당초	변경	증,감
노들북고가
누수유도차단장치	0→111	m	0	18,786,639	(증) 18,786,639
방호벽 차수Joint	0→48	m	0	16,096,656	(증) 16,096,656
특럭형 탑재 크레인	0→48	hr	0	1,774,032	(증) 1,774,032
2. 소 계				36,657,327	(증) 36,657,327
3. 제경비 (1.5%)	1	식	0	50,100,000	(증) 50,100,000
4. 부가세	1	식	0	5,010,000	(증) 5,010,000
5. 공사비 계			0	55,110,000	(증) 55,110,000

라. 시설관리공단 검토의견

○ 검토결과 노들북고가의 안전성 확보를 위하여 발주청 지시대로 신교, 구교 사이의 누수부에 유도차단장치 및 방호벽 조인트 설치 시행함이 타당하다고 사료 됨.

□ 조치계획

○ 노들북고가의 안전성 확보를 위하여 작업지시(2차) 사항을 반영한 위 보고 내용대로 시행함이 타당함으로 시설관리공단에 현장품질, 안전관리 철저 및 시공시 감독업무에 철저를 기하여 공사 시행토록 통보 조치하고,

○ 시설물 유지관리 및 공사의 원활한 추진을 위하여 공사비 증가는 추후 설계변경시 낙찰차액 및 공사비 잔액을 사용하여 본 공사 예산범위 내에서 공사비 반영토록 조치하고자 합니다.

붙임 : 시설관리공단 실정보고 관련서류 1부.  끝.