투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	(납기)변경계약 체결 알림-제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

물재생과-6781(2015.10.15)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 알려드립니다.

1. 계약건명 : 제3처리장 종침 사이폰식 슬러지수집기 개량공사

2. 계약금액 : 금76,485,000원(금칠천육백사십팔만오천원)

3. 계 약 일 : 2015년  08월  24일

4. 납품기한 : 67일 연장

- 변 경 : 2015년  12월  28일

- 당 초 : 2015년  10월  22일

5. 변경사유 : 종침오니수집기 조작반 정비사업(전기분야)연계한 시운전 필요

6. 계약업체 : **************

*****************

붙임 : 공사변경계약체결통보서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	10/26 김동기
협조자
시행	관리과-14712	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	부분공개