투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	을묘종합건설(주) 대표 임주현
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 공사기간 변경 승인 통보 (하남미사~위례연계 열배관굴착복구공사)

1. 도로보수과-5687호(2015.8.7.)호 및 을묘 제15-134호(2015.10.20.)와 관련입니다.

2. 을묘종합건설에서 『하남미사~위례연계 열배관공사 교통안전시설물(노면표시)

설치공사』 원인자부담 공사와 관련하여 다음과 같이 공사기간 변경을 승인하오니,

3. 원인자는 『원인자 준수사항』 및 『노면표시 시방서』에 의거 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바라며, 유관기관에서는 본 승인 통보내용을 참고하시기 바랍니다.

가. 변경사항

공사명	구분	설계사	감리사	시공사	공사기간
					당 초	변 경
하남미사~위례연계 열배관공사 교통안전시설물 (노면표시)설치공사	노면 표시	㈜영호 이앤씨	㈜영호 이앤씨	㈜서주 라인	‘15.3.5 ~ '15.10.20	‘15.3.5 ~ '16.4.30

나. 변경사유 : 공사지연에 따른 공사기간 연장.

끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이민호		주무관	송광석		도로보수과장	10/26 김환겸
협조자
시행	도로보수과-7844	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0342	/전송	02-2040-0307	/		/	대시민공개