투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰[잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역(2차)]

1. 우리본부에서 시행중인 「잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역(2차)」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 잠원2 빗물펌프장 신설공사외 1개소 전면책임감리용역(2차)

나. 도 급 비 : 80,000,000원

다. 시 공 사 : ㈜신명건설기술공사외 2개사

라. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
총차	2013.04.01 ~ 2015.12.31.	2013.04.01 ~ 2015.12.31	변경없음
2차	2015.01.01 ~ 2015.10.31	2015.01.01 ~ 2015.11.19	증)19일

〇 연기에 따른 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지연배상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 1) 준공기한 연기검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	박찬표		치수시설과장	김흥근		방재시설부장	10/26 임춘근
협조자	주무관	이병환		계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-14268	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8	/
전화	3708-8775	/전송	3708-8756	/	p25800@seoul.go.kr	/	대시민공개