함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	준공기한 연기 시행(동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사』의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사

나. 계 약 자 : 창협건설(주)  대표 강인제

다. 계약금액 : 1,199,753,240원

라. 공사기간

- 당 초 : 2015.06.09. ~ 2015.10.31.

- 변 경 : 2015.06.09. ~ 2015.11.30.

마. 연기사유 귀책소재 : 동부수도사업소

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 연기사유 :

- 관급자재(강직관) 납품기한 지연 및 하수도 하월(2개소) 추가공종 발생에 따른 절대공기 부족

붙 임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 및 준공기한 연기 관련 서류 각 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	최명익		동부수도사업소장	10/26 홍현구
협조자
시행	급수운영과-28319	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개