문서번호	시설관리과-17812
보존기간	년
결재일자	2015.10.26.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관	주무관	시설관리과장
정성식	代이한수	10/26 이계환
협 조

『2015년 수유동55-34~58-9외4개소 배급수관 정비공사』          공사실정보고서 제출에따른 검토보고

2015. 10.

북부수도사업소

시설관리과

『2015년 수유동55-34~58-9외4개소 배급수관 정비공사』           공사실정보고서 제출에따른 검토보고

우리사업소에서 시행중인 『수유동 55-34~58-9외 4개소 배급수관 정비공사』   관련 공사실정 보고서 제출에 따른 검토결과를 아래와같이 보고합니다.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 수유동 55-34~58-9외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : D=80~200mm, L=1,270m

다. 도 급 자 : ㈜에스비케이건설(대표 김용웅)

라. 도 급 비 : 266,775,600원

마. 공사기간 : 2015.5.26.~ 2015.11.21

바. 현공정률 : 90%(2015.8.31.현재)

사. 관련근거 : 공사감독2처-16727(2015.10.19)

2. 실정보고 내용

구간	현황 및 문제점	보고내용(검토의견)	비고
대체구간 (300mm)	▶미환토 반영 - 추가구간인 삼양로 93길 8번지~ 삼양로 99길 6번지간(우이초등학교앞) 상수관(D=300mm)매설 공사중 일부구간(320m중 50m)굴착토사가 양질의 토사가 발생된 실정임,	▶굴차토사가 양질의 토사가 발생한 지점에 대해서는 미환토시행하고자 함. - 미환토 : 50m	감4,500천원
	▶관로 미부설 추가구간중 일부구간(L=10m)이 경전철 공사장 내부에서 관로접합을 하여야하나 복공 및 흙막이 토류벽이 설치되어 있어 작업이 불가능한 상태임.	▶경전철공사장내에 부설된 기존관(D=200mm,L=10m)은 교체가 불가능한바 공사장 토류벽앞 기존관(200mm)에 연결 작업하고자함. - 관로미부설 : D=300mm,L=10m

3 검토의견

○ 상기와같이 본 공사실정보고내용에 대하여 현장여건을 감안 승인 처리함이

타당하다고 사료되며

○ 위와같은 사항을 시설관리공단에 통보하여 추진토록하고 추후 설계변경

반영조치토록 작업지시코자함.

붙임 : 1. 공사실정보고서 각 1부.  끝.