문서번호	교통운영과-20899
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
박종현		김세교	10/27 강진동
협조

- 2014년 하반기 교통사망사고지점(수색역교차로) -

개선사업 변경시행(안) 보고

2015. 10

교통운영과

2014년 교통사망사고 지점 개선 변경 시행 보고

2014년 교통사망사고지점 “수색역교차로” 개선사업 관련 하수관로 등 이설에 따른 공사비 예산 추가 요청이 있어 변경 시행방안을 보고 드림.

□ 관련근거

○ 교통운영과-18087(’15.9.16) : 2015년 교통안전시설 개선사업 변경계획

○ 은평구 교통행정과-42324(‘15.10.13) : 예산 추가지원 요청

○ 도로교통공단 안전시설물-6934(‘15.10.20) : 실시설계 검토의견 제출

□ 예산 재배정 및 예산 추가 요청 현황

○ 2014년 교통사망사고 개선대상 지점인 “수색역 교차로” 의 개선 공사비를 은평구와 서부도로사업소에 재배정하였으나,

○ 은평구에서는 은평터널 방향 보도 후퇴로 인한 하수도관 이설비, 차도 및 보도 공사비를 추가요청한 사항으로, 보도 축소와 더불어 하수관로 이설공사 등으로 인한 통행불편이 예상되며, 추가 재배정할 예산이 부족한 실정임

○ 또한, 수색역교차로는 도로교통공단, 자치구 담당자와 합동 점검결과 횡단보도와 보도를 신설할 경우 지역의 특성상 우기철 집중호우시 도로침수가 우려되며, 인근 목공소 및 수색치안센터 등 진출입로 폐쇄에 따른 민원으로 사업추진에 어려움 있음.

○ 예산 추가 요청액                                               (단위:천원)

연번	자치구	지 점 명	개선내용	재배정 금액	변경 요구액	비 고
1	은평구	수색역교차로	횡단보도 신설 및 보도 후퇴 등	71,865	132,487	은평구 교통행정과- 42324 (15.10.13)

□ 조치의견 및 계획

○ 수색역 교차로의 교통사망사고 주원인은 무단횡단으로 인한 사고로서 교통사고 잦은 곳 개선사업의 원활한 추진과 효율적인 예산 집행을 위하여 수색역교차로⇒ 은평터널 방면 보행자 방호울타리(약 L=50m) 설치

○ 다만, 수색역 교차로(수색치안센터 앞) 보행자 무단횡단으로 인한 교통사망사고를 예방하기 위하여 우선 무단횡단금지시설(약 L=70m)를 설치하되, 저지대의 우기철 도로침수 및 차량진입로 폐쇄에 따른 민원 해소방안 등 충분히 재검토하여 향후 개선사업을 재추진하고자 함

○ 사업예산 감 재배정 계획                                        (단위:천원)

자치구	지점명	예산 재배정 계획			재배정 부서
		기 재배정액	금회 재배정액	증·감액
합 계		106,315	18,003	감)88,312
은평구	수색역교차로	16,400	9,874	감)6,526	서부도로 (도로보수과)
		18,050	0	감)18,050	서부도로 (기전과)
		71,865	8,129	감)63,736	은평구청 (교통행정과)

따로붙임 : 실시설계(변경)도면 및 현황사진 1부. 끝.