문서번호	급수운영과-26564
결재일자	2015.10.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	10/27 조면행
협 조

단수계획 검토보고

2015. 10

강서수도사업소

2015년 양천구관내 목동 751-1~752-3번지 노후 상수도관 정비공사의 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보 등을  검토 보고 함.

2015.  10.  27.

보고자 : 시설7급  성명  여수현

1. 공사 현황

○ 공 사 명 : 2015년 목1동외 17개동 상수도공사(장기계속단가)

○ 공사개요 : 개량 96,97 : 목동 751-1 ~ 752-3 (관개량 D=200mm / L=170)

○ 시공회사 : 성심건설(주)    대표 김 길 열

1. 단수계획

가. 단수 지역 및 시간

연번	공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	작업일수
1	목동 751-1 ~ 752-3	2015.10.29.(목)	13:00 ~ 17:00	노후상수도관 교체공사	30	1
2	목동 751-1 ~ 752-3	2015.10.30.(금)	09:00 ~ 15:00	노후상수도관 교체공사	5	1

나. 단수작업 세부계획

- 작업계획(개량96)

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D100mm~150mm 3개소
절단 및 직결연결	240분	D150~200mm
세척 및 통수	30분	D100mm 소화전 1개소
합 계	4시간 00분

- 작업계획(개량97)

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D100mm~200mm 3개소
관개량작업	300분	D200mm
세척 및 통수	30분	D100mm 소화전 1개소, 다용도 1개
합 계	6시간 00분

다. 홍보 계획

○ 홍보매체를 통한 단수홍보

- 상수도홈페이지

○ 단수지역 안내문 배포 및 부착 (시공사 및 감리, 단수 2~3일전 시행)

- 단수지역에 가가호호 방문하여 단수안내문 부착

- 벽보용 안내문은 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내 부착

- 단수 전 사용할 물은 미리 용기에 받도록 안내

3. 단수계획 검토

가. 검토결과

연번	단수 위치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	단수 사유	검토 결과
1	목동 751-1 ~ 752-3	2015.10.29.(목)	13:00 ~ 17:00	30	노후상수도관 교체공사	작업시간 검토결과 적정함
2	목동 751-1 ~ 752-3	2015.10.30.(금)	09:00 ~ 15:00	5	노후상수도관 교체공사	작업시간 검토결과 적정함

나. 노후 상수도관 교체로 인한 작업계획 일정 검토결과 단수시간을 조정하여 단수작업을 승인코자 하며 현장홍보가 철저히 되어 단수민원이 최소화될 수 있도록 단가계약 교육, 감리업체(이준엔지니어링)에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

4. 기타 행정사항

가. 공사장 안내간판 및 안전시설 설치 철저 지도감독

나. 공사 관계자 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	성심건설(주)	02-835-6631
현 장 소 장	김 형 국	*************
감 리 자	최 철 수	*************
발주청 담당	여 수 현	02-3146-3945

붙 임  : 단수안내 계획서 및 홍보문 1부.  끝.