문서번호	도로보수과-7897
결재일자	2015.10.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	동부도로사업소장
정용재		김환겸	10/27 代김현수
협조
	주무관		송광석

설계변경(2회) 검토보고(관내포장도로 불량맨홀정비공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

동부도로사업소

도로보수과

설계변경(2회) 검토보고

관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

우리 사업소에서 시행중인 『관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 신규공종 발생 및 시공물량 증·감 등에 따른 설계 변경(2회)을 시행하고자 함.

1		공사 개요

공 사 명 : 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

공사기간 : 2015. 5. 19 ~ 2015. 12. 31.

공사개요 : 불량맨홀정비(주간) 284개

불량맨홀정비(야간) 258개

도 급 비 : 429,503,690원

도 급 자 : ㈜태강디앤씨 대표이사 최성숙

2		변경사유 및 변경내용

설계변경 사유

o 맨홀 관리기관 공종별 시공 물량 증, 감

주요 변경내용

o 불량맨홀 정비(주간) : 당초 284개소, 변경 411개소

o 불량맨홀 정비(야간) : 당초 258개소, 변경 328개소

공사비 변경

o 추가예산 재배정 및 낙찰차액 사용

구 분		당 초	변 경	증	비고
총 공 사 비		₩429,503,690	₩574,000,000	₩144,496,310
도급비	공 급 가 액	₩390,457,900	₩390,457,900	₩131,360,282
	부가가치세	₩39,045,790	₩39,045,790	₩13,136,028
	계	₩429,503,690	₩429,503,690	₩144,496,310

3		조치 계획

상기 설계변경 내용이 적정하므로 변경계약 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. ㈜ 태강디앤씨 대표이사 협조 공문 1부(별도첨부).  끝.