문서번호	토목부-22508
결재일자	2015.10.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	10/27 노우성
협조

강동구 서원마을 민원사항(법면부 조경석 설치)조치방안 검토보고

- 구리암사대교 건설공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

도시기반시설본부

(토 목 부)

강동구 서원마을 민원사항(법면부 조경석설치)조치방안 검토보고

강동구 서원마을 주민대표 등 민원 요구사항(법면부 조경석 설치)에 대한 조치방안 검토 보고임.

※ 암사(감리)2015 - 558호(’15.10.23.) : 서원마을 민원 요청사항 검토보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 197,939백만원(15차 21,739백만원)

○ 공사기간 : ’06.4.5. ∼’16.04.30.(15차 ’14.12.11.∼’15.10.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진배경 및 경위

- 암사IC 서원마을 주민대표 등 지역주민들의 지속적인 민원 제기사항으로 주민 면담 등을 통해 도출된 구리암사대교 진입 램프(F) 법면부 공간확보를 위한 시설(조경석) 설치

‣ 2014. 8.11. : 민원 면담(주민대표, 강동구 등 관계자)

※ 서원마을에 접한 법면부(Ramp-F) 운동기구 설치 요구 → 검토후 재협의

‣ 2015. 3.10. : 법면부 조치방안 민원 면담(주민대표,강동구 등 관계자)

※ 법면부 공간확보를 위한 조경석 설치 수용 – 기타 수용 불가
‣ 2015. 3.10. : 법면부 조치방안 민원 면담(주민대표 등 관계자)

※ 운동기구 설치 지속 요구 → 강동구에서 처리할 사항으로 수용 불가

‣ 설치 위치

○ 설치 규모 및 소요공사비

(단위 : 천원)

공 종	규 격	단위	수 량			공 사 비			비고
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
조경석 쌓기	500×700×800	㎡	-	85	증) 85	-	17,659	증)17,659
제경비,부가세						-	3,341	증)3,341
도급비						-	21,000	증)21,000

○ 감리단 검토의견

- 서원마을 주민대표 등 지역주민들의 지속적인 민원제기 사항으로 주민면담 결과에 의해 법면부 조경석을 설치하는 것으로 설계변경시 반영하는 것이 타당함.

□ 조치의견

○ 상기 감리단 보고내용과 같이 ‘서원마을 민원사항(법면부 조경석 설치)’에 대한 실정보고건에 대해 승인하고 추후 설계변경시 반영 정산토록 조치코자 함.

- 서원마을 민원사항 법면부 조경석 설치 : 증) 21백만원

붙  임 : 감리 검토의견서 및 관련공문 1 부.  끝.