투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	시설과장
(경유)
제 목	변경 계약체결 통보(백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사)

1. 시설과-6513(2015.10.23.) 호와 관련입니다.

2. 「백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사」 변경계약 요청건에 대하여 검토한 바, 지방계약법 제22조 및 동법 시행령 제74조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장제6절(공사설계변경)에 해당되어 아래와 같이 변경계약을 체결하였사오니 참고하시기 바랍니다.

가. 건       명 : 백인제가옥 사무동 기단바닥 보수공사

나. 변경계약일자 : 2015. 10. 26.(월)

나. 변 경 내 용

구 분	변 경 전	변 경 후	변 경 내 용
계약기간	2015. 10. 25.까지	2015. 10. 30.까지	5일 연장
과업내용	□기단바닥 보수공사	□기단바닥 보수공사 □타일 철거 및 신설(추가)	시방서 참조
계약금액	**********	**********	***********

라. 변경사유

- 보수공사 중 타일 들뜸 현상을 발견하여, 고객 및 관리자의 안전과 화장실 사용 불편을 해소하기 위하여 설계변경 및 준공기한 연기가 필요함

붙  임 1. 합의각서 및 변경과업지시서(공사시방서) 각 1부.

2. 준공기한 및 금액 변경에 따른 계약변경의뢰 공문 1부.

3. 변경계약체결통보서 1부. 끝.

	총무과장
주무관	주슬기		총무과장	10/28 연규승
협조자	주무관	임정민
시행	총무과-13042	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(7)