투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	롯데건설주식회사
(경유)
제목	교통안전시설 원인자부담공사 공사기한연장 승인(제2롯데월드 주변 교통신호제어기 등 교체-신호)

1. 롯데건설주식회사 롯건지하광장 제2015-26호(2015.10.26.), 기전과-5796호(2014.7.15.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내에서 시행하고 있는「제2롯데월드 외곽도로 조성공사 관련 교통안전시설(신호) 원인자부담공사」의 공사(준공)기한 연장승인요청에 대하여 아래와 같이 연장승인하오니 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 제2롯데월드 외곽도로 조성공사 관련 교통안전시설(신호) 원인자부담공사

나. 공사장소 : 송파구 올림픽대로 잠실역사거리, 제2롯데월드 앞, KT삼거리(3개소)

다. 공사내용 : 교통신호제어기 교체 2대, 신호등지주 신설 및 교체 26본.

라. 승인내용 : 공사(준공)기한 연장

- 연장사유 : 유관기관 협의지연

- 당 초 : 승인일 ~ 2015. 9.30.

- 변 경 : 승인일 ~ 2015. 11.30.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	김동현		기전과장	10/28 남궁영주
협조자
시행	기전과-10692	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33(대치동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0362	/전송	02-2040-0365	/		/	대시민공개