문서번호	공간정보담당관-333
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
최지혜		김태준	전결 01/10 조봉연
협조

『2013년 항공사진 통합관리서비스』       2014년 1월2주 주간보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서 (단체)명	협의내용	협의결과
공간정보 담당관-2312				179,644천원

『2013년 항공사진 통합관리 서비스』

2014년 1월2주 주간보고

사업명	2013년 항공사진 통합관리 서비스
사업기간	2013.6.24. ~ 2014.1.23. (7개월)	진척율	사업관리	개발	DB구축	전체
사 업 비	179,644천원	계획	8.5/10	43.0/50	40.0/40	92/100
사업 PM	씨엠월드컨소시엄 박철희차장	실적	8.5/10	36.2/50	33.0/40	78/100
주요내용	o 계획대비 실적 진행률 저조사유 - 사유: 2013년 항공사진 신규촬영이 기상조건 등으로 예상 일정보다 늦어짐 - 대책: 영상집성 및 보안조치의 DB구축 진행이 늦어졌으나 추가인력의 투입으로 대책을 마련, 사업기간내에 완료토록 함 o 항공사진 영상제작 - 위치보정 및 영상집성, 원본사진 업로드, 보안지역 조치 100% 완료 - 차주 타일맵 제작 등 마무리 작업

구분	금 주 실 적 (2014.01.03. ~ 2014.01.09.)	차 주 계 획 (2014.01.10. ~ 2014.01.17.)
시스템 개발	1. 완료보고 1-1. 완료보고 자료 작성 2. 항공영상 원본자료 반납 일시 : 2014년 01월 03일 오전 10:30 ~ 13:30 장소 : 서울시 데이터 센터 -> 건축기획과 사진실	1. 완료보고 1-1. 완료보고서 작성 및 수행 2. 준공검사 2-1. 준공계 및 준공검사 자료 작성
항공사진DB구축 및 영상지도 제작	1. 원본파일 등록 1-1. 등록 화면 수정(엑셀 자료 업로드) 1-2. 원본 파일 업로드 테스트 2. 통계정보 2-1. 내부(항공사진 웹 서비스) 시스템 통계 및 현황 추가 3. 단위 테스트 3-1. 단위 테스트 및 시스템 안정화 4. 로그인 연계 4-1. SSO 로그인 연계 분석	1. 테스트 1-1. 단위기능 테스트 1-2. 통합 테스트 2. 시스템 안정화 2-1. 버그 수정 및 시스템 안정화 3. 서울시 항공영상 시민 서비스용 시연을 위한 System 설정
기타	1. 서울시 데이터 센터 자료 이관 (2013년 12월 27일 완료 예정) - 망실 및 일부 손상 데이터 입수 및 변환처리 - 누락자료 DB구축 - 주점정보 DB구축 - 원본자료 파일명 변경 DB구축 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 보안 규정에 의한 보안처리 - 낱장사진 보안지역 사진번호 추출 3. 과거사진 보안지역 조치작업 수행 (2014년 1월 6일 완료) - 전체 : 148,996 - 금주 : 25,385 - 누계 : 148,996 (100.%)	1. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 보안 규정에 의한 보안처리 - 10cm, 25cm 급 항공영상 변환 처리 2. 2013년도 항공영상 보안처리(국정원 보안) - 국정원 보안 심의 자료 입수 - 보안 규정에 의한 보안처리 3. 2013년 항공영상 타일맵 생성 - 서울시 항공영상 시민 서비스용 25cm급 타일맵 4. 영상재단 및 저장 - 1/5,000 도곽영상 제작 - 구별 영상 제작

붙임 1. 주간진척보고(2014년01월2주) 1부.  끝.