투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(옥수,금호터널 보도차단벽 설치공사 건설폐기물 처리용역)

우리 사업소에서 시행중인 “옥수,금호터널 보도차단벽 설치공사 건설폐기물 처리용역”에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 옥수,금호터널 보도차단벽 설치공사 건설폐기물 처리용역

나. 계약기간 :2014.12.03 ~ 2015.12.31

다. 도 급 사 : 문화기업㈜  대표 박해경

다. 예산과목 : 도시개발특별회계, 도로시설관리, 터널시설관리,                              옥수 금호터널 보도차단벽 설치, 시설비 및 부대비,                              시설비

라. 설계변경

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증.감액	비고
총 용역비		3,461,800	1,757,000	감 1,704,800
도급액	공급가액	3,147,091	1,597,273	감 1,549,818
	부 가 세	314,709	159,727	감 154,982
	계	3,461,800	1,757,000	감 1,704,800

마. 설계변경사유

- 옥수 금호터널 보도차단벽 설치공사가 추가 예산 미확보로                     타절 준공됨에 따른 폐기물 반출량 감소

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.

주무관	이경수		시설보수과장	10/28 박춘배
협조자	주무관	김형섭
시행	시설보수과-3848	(		)	접수		(		)
우	04807	서울시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소	/
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	leesoo@seoul.go.kr	/	대시민공개