문서번호	도로보수과-7961
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	도로보수과장		동부도로사업소장
이민호	송광석	김환겸		10/28 代김현수
협 조

준 공 기 한 연 기 보 고

(2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사)

2015. 10

동 부 도 로 사 업 소

도 로 보 수 과

준공기한 연기 보고

(2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사)

우리사업소에 시행하고 있는 『2015년 도로굴착 시행도로 정비공사』와 관련, 포장도로 정비공사구간내 지하매설물 굴착공사로 인해 절대공기 부족으로 준공기한을 연기코자 함.

	1		공 사 개 요

○ 공 사 현 황

공사명	공사기간	공사비 (천원)	공사개요	도급자
2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사	2015. 6. 8 ~ 10. 30	264,185	절삭및덧씌우기 T=5cm, A=567a	대진건설 대표 조규진
2015년 도로굴착복구 시행도로정비공사 폐아스콘처리용역	2015. 6. 19 ~ 10. 31	69,650	폐아스콘 처리 및 운반 6,800톤	남부이앤티 (주) 대표 이 격
2015년 도로굴착복구 시행도로 노면표시공사	2015. 6. 19 ~ 10. 31	47,523	노면표시 도색 22,189m	㈜세운씨앤씨 대표 주혜경

	2		연 기 사 유

○ 2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사구간내 헌릉로 헌릉IC에서       염곡IC구간에 SK텔레콤(주)로부터 통신관로 매설 도로굴착협의가       있어 검토한 바,

포장도로 이중굴착 방지를 위해 통신관로 매설 후 포장도로정비를       시행하는 것이 타당하다고 판단되어 불가피하게 준공기한을 연기       하여야 할 실정임.

	3		조 치 의 견

○ 상기와 같은 실정으로 준공기한을 연기하여 공사시행에 만전을        기하고자 함.

- 변 경 내 용

공사명	도급자	당 초 공사기간	변 경 공사기간
2015년 도로굴착복구 시행도로 정비공사	대진건설 대표 조규진	2015. 6. 8 ~ 10. 30	2015. 6. 8 ~ 12. 31
2015년 도로굴착복구 시행도로정비공사 폐아스콘처리용역	남부이앤티 (주) 대표 이 격	2015. 6. 19 ~ 10. 31	2015. 6. 19 ~ 12. 31
2015년 도로굴착복구 시행도로 노면표시공사	㈜세운씨앤씨 대표 주혜경	2015. 6. 19 ~ 10. 31	2015. 6. 19 ~ 12. 31

- 지체상금부과여부 : 미부과

끝.