투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	『중앙버스전용차로(신도림역앞) 흐름개선사업 교통신호기 공사』- 설계변경(1차-공기연장) 시행

『중앙버스전용차로 흐름개선사업 교통신호기 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차-공기연장)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 중앙버스전용차로 흐름개선사업 교통신호기 공사

2. 공사기간

- 당초 : 2015.09.09. ~ 2015.10.31.

- 변경 : 2015.09.09. ~ 2015.11.30.(공기연장 30일)

3. 공사위치 : 구로구 신도림동 신도림역

4. 도 급 자 : 세한종합전기 대표자 오진권

5. 설계변경내역 (변경없음)

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총공사비	13,929,300	13,929,300	-	변경 없음
도 급 비	13,929,300	13,929,300	-

6. 설계변경 사유 : 본 공사는 중앙버스전용차로 내 횡단보도(1면) 이전에                                  따른 차량지주 2본 이설 및 보행지주 1본 철거공사로                                  강서도로사업소 도로보수과에서 시행하는 토목공사와                                  공사공정 예정계획이 서로 맞지 아니하여 공사기간을                                  조정하여 추진코자 합니다.

7. 예산과목 : 교통운영과, 도로교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고,                             중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

붙임문서 : 1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

★주무관	홍승찬		기전과장	10/28 박재경
협조자	주무관	박태진		관리단속과장	이은엽
시행	기전과-13594	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7989	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개