문서번호	설비부-13365
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
지장환		이달영	10/28 박기형
협조

『구리암사대교 건설 전기공사』

구리한강시민공원 방송설비 복구계획 실정보고 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

『구리암사대교 건설 전기공사』

구리한강시민공원 방송설비 복구계획 실정보고 검토 보고

「구리암사대교 건설 전기공사」와 관련 감리단에서 구리한강시민공원 방송설비 복구계획에대한 실정보고를 하여 검토결과를 보고드림.

공사개요

□ 공 사 명 : 구리암사대교 건설 전기공사

□ 공사규모 : 가로등 설치 604본, 경관조명 실치 1식

□ 공사기간 : '10. 07. 28 ~ '15. 12. 31.

□ 도 급 액 : 4,038,310 천원(4차 817,817 천원)

□ 시 공 사 : ㈜모범전설

□ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링외 1개소

추진경위

□ 구리암사대교 건설공사 관련 구리한강공원 진입로 및 통행로 복구계획 협의 회신

(구리시 공원녹지과-2473,2015.02.27.)

□ 한강둔치 시설물 원상복구 협의 의견 통보(토목부-12664,2015.06.19.)

□ 구리한강시민공원 방송설비 복구계획 알림(설비부-12136,2015.07.27.)

보고내용

□ 주요 실정보고 내용

- 방송설비에 대한 유지관리기관(구리시 공원녹지과)의 원상복구 의견 반영

□ 주요 변경내용

품 명	규 격	수 량	단 위	비 고
전선관	30mm ~ 50mm	1,606	m	스피커배관
FCVV케이블	4mm2/2C,4mm2/10C	1,763	m	스피커 케이블
스피커 폴	5m	9	개
기초con“c	400×600×600	9	개
핸드홀	600×600	9	개	케이블 포설용 핸드홀
PA스피커	컬럼형 옥외 20W	18	개	폴 당 2개
엠프	480W	1	개

□ 공사비 증·감내용

(단위 : 천 원)

구 분	당초금액	변경금액	증·감	비 고
직접공사비	-	25,693	증) 25,693
제경비	-	11,037	증) 11,037
합 계	-	36,730	증) 36,730	VAT포함

감리단 검토의견

□ 구리암사대교 건설 공사 관련 한강시민공원 진입로 및 통행로 복구계획 협의사항으로서

□ 구리시 의견이 반영된 구리한강시민공원 방송설비 실정보고 내용이 타당함

조치의견

□ 유지관리기관인 구리시 공원녹지과 의견을 반영하기 위한 것으로서 감리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단됨으로

□ 실정보고 사항을 승인하고 설계변경 시 계약금액이 조정될 수 있도록 감리단에 통보하고자 함.

붙임  1. 감리단 실정보고 1부.  끝