시  민

문서번호	시설관리과-17943
보존기간	년
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	기전팀장	시설관리과장
정희철	김충완	10/28 이계환
협 조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

【2015년 가압장·증압장 모터펌프 등 기계설비 유지보수】

2015. 10.

북부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 추진중인“2015년 가압장·증압장 모터펌프 등 기계설비 유지보수 ”에
대하여 현장여건 변동으로 물량 증․감이 발생됨에 따라 설계변경에 앞서 심의위원회를
개최하여 심의완료 결과를 보고함

1. 일 반 현 황

가. 건   명 : 2015년 가압장·증압장 모터펌프 등 기계유지보수(연간단가)

나. 개   요 : 물량증감(펌프대수 변경에 의한 물량증감)

신규공종 추가(수중모터펌프(5HP) 수리, 만수감지기 설치, 바이패스 설치)

다. 계약기간 : 2015.4.30 ~ 2016.3.31.(보수기간: 2015.4.30.~2015.10.21.)

라. 도 급 비 : (당초) 금68,520,000원(금육천팔백오십이만원)

(변경) 금67,281,000원(금육천칠백이십팔만일천원)

바. 도 급 자 : 동원펌프(주)  대표 김덕환

2. 설계 금액 변경 내역

구 분	당초금액	변경금액	증 ․ 감액	비고
계약금액	68,520,000	67,281,000	감 1,239,000

3. 심의회 개최

가. 심의일자 : 2015년 10월28일(수) 10:30~11:00

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

다. 위 원 장 : 공업6급 김충완

라. 심 의 자 : 공업6급 차경호, 공업7급 배용우, 공업8급 정양진

4. 심 의 내 용

가. 계약물량 증·감(변경)에 대한 설계변경 사항

나. 수량변동 및 단가적용의 적정성 여부

다. 계약변동 (증․감)수량 단가 낙찰률 적용범위내 적용 적정여부 등

5. 설계변경 계약물량 증감현황

구 분	기존	변경	신규공종	증	감	비고
원심펌프수리(201~300㎥/h)	1	1	-	-	-	상계가압장
수중펌프수리(5HP)	0	3	3	3	-	삼각산, 쌍문
수중펌프수리(10HP)	2	1	-	-	1	우이
수중펌프수리(15HP)	1	1	-	-	-	월계1
수중펌프수리(20HP)	1	0	-	-	1
수중펌프수리(30HP)	1	0	-	0	1
밸브교체(150A)	1	1	-	-	-	상계가압장
만수감지기	0	1	1	1	-	삼각산
바이패스 설치	0	2	2	2	-	도봉, 쌍문4

6. 심의 결과

가. 설계변겨의 타당성 : 타당함

나. 제경비 적정산정 및 적용 적정성 : 적정

다. 계약변동(증·감) 물량 계약단가 적정 적용여부 : 적정

라. 각종 제반 규정 준수여부 : 준수

마. 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토 : 적합

첨 부 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 사유서 1부.

3. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.