함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보

1. 공사감독2처-17190(15.10.26)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『청계2가~청계5가 교차로간 송배수관부설공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무 및 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

현황 및 문제점	사업소 검토의견	비고
□ 아스팔트 포장두께가 t=40~50㎝임에 따라,포장깨기 및 폐기물량 증가되는 실정으로 증가된 아스팔트 및 폐기물량은 추후 실시공수량 정산코자 함.	□ 아스팔트 포장두께가 t=40~50㎝임에 따라, 증가되는 포장깨기 및 폐기물량은 향후 설계변경시 반영 할 것.
□ 청계천 복원공사 전 복개도로 구조물 기초가 불규칙하게 돌출 저촉 및 타시설물(전선,통신,하수암거 등)밀집 설치로 저촉되어 공사구간 굴착시 경사면 토사유출에 따른 굴착 폭 확대 - 기존 복개도로 구조물 철거후 관로부설하고 관 부설에 저촉되는 철근콘크리트 및 지장물은 현장에서 판단하여 깨기 및 곡관등으로 관부설 진행 및 굴착공사의 특수성을 감안하여 선시공후 실제시공으로 수량 정산코자 함.	□ 청계천 복원공사 전 복개도로 구조물 기초가 불규칙하게 돌출 저촉 및 타시설물(전선,통신,하수암거 등)밀집 설치로 저촉되어 공사구간 굴착시 경사면 토사유출에 따른 굴착 폭 확대 및 기존 복개도로 구조물 철거후 관로 부설토록 하고, 관 부설에 저촉되는 철근콘크리트 및 지장물은 현장에서 판단하여 깨기 및 곡관등으로 관부설 진행하고 굴착공사의 특수성을 감안하여 선시공후 설계변경시 반영 할 것.

가. 공단보고 및 검토의견

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이생기		시설관리팀장	채재일		시설관리과장	10/28 나태산
협조자
시행	시설관리과-31971	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02)3146-2199	/전송	02)3146-2239	/		/	대시민공개