투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	삼성교외 7개소 정밀점검용역 설계변경(정산) 시행

우리 사업소에서 시행중인 삼성교외 7개소 정밀점검 용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 삼성교외 7개소 정밀점검 용역

나. 용역기간 : 2015. 5. 19 ~ 2015. 11. 14

다. 도 급 자 : ㈜세안안전진단  대표  박 기 열

라. 예산과목 : 도로시설관리,도로시설물운영,시설물안전점검 및 진단,

시설비 및 부대비, 시설비

마. 설계변경 내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증.감	비고
총용역비		100,348,000	100,018,000	감330,000
도급비	공급가액	91,225,454	90,925,454	감3000,000
	부가가치세	9,122,546	9,092,546	감30,000
	계	100,348,000	100,018,000	감330,000

바. 설계변경 사유

자문위원회 개최에 따른 자문비 정산(당초 : 6인 → 변경 : 3인)

따로붙임 : 변경 내역서 1부. 끝.

주무관	조장호		시설보수과장	박용선		동부도로사업소장	10/28 代김현수
협조자	주무관	나철흠		주무관	이중연		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-6142	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0372	/전송	02-2040-0308	/		/	대시민공개