투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	유지보수(통합) 작업지시 2차 실정보고(1회) 승인 통보(2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합))

1. 영호 본15-10-18(2015.10.28.)호와 관련입니다.

2.「2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)」와 관련하여, 작업지시 2차 실정보고(1회)에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항(1회) 승인 (작업지시 2차)

1) 실정보고 대상 작업내용

연번	작업장소	작업내용	비고
1	강서구 송정초교(보) 외 1개소	음향신호기 2대 교체(버튼 포함)	총25대 교체
2	양천구 양천구의회(보) 외 11개소	음향신호기 18대 교체(버튼 포함)
3	영등포구 영등포로터리 외 3개소	음향신호기 5대 교체(버튼 포함)

2) 작업기간 연장 승인

가) 당초 : 2015.10.14. ~ 2015.10.30.

나) 변경 : 2015.10.14. ~ 2015.11.13.

다) 연장사유 : 음향신호기 기능검사 관련 도로교통공단과 검사일정

협의에 따른 작업기간 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)벽슬이앤지 대표자 오춘희,(주)영호이앤씨 대표자 서태교
주무관	박태진		기전과장	10/29 박재경
협조자
시행	기전과-13639	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개