투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	유지보수(통합) 작업지시 1차 실정보고(1회) 승인 통보(2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합))

1. 영호 본15-10-16(2015.10.28.)호와 관련입니다.

2.「2015년 교통신호기 유지보수공사(연간단가)(통합)」와 관련하여, 작업지시 1차 실정보고(1회)에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항(1회) 승인 (작업지시 1차)

1) 실정보고 대상 작업내용

연번	작업장소	작업내용	비고
1	광장아파트(경보) (영등포구 여의도동)	경보등 지주 1본 철거, 통합지주 1본 설치 (와이어 없는 지주)
2	영등포여상앞길(경보) (양천구 신정동)	경보등 지주 2본 철거, 통합지주 1본 및 일반지주 1본 설치 (와이어 없는 지주)
3	일신빌딩(경보) 주변 (양천구 신월동)	경보등 지주 2본 철거, 통합지주 1본 및 일반지주 1본 설치 (와이어 없는 지주)
4	일성스카이빌(경보) (강서구 화곡동)	경보등 지주 3본 철거, 통합지주 2본 설치 (와이어 없는 지주)

2) 작업기간 연장 승인

가) 당초 : 2015.09.21. ~ 2015.11.06.

나) 변경 : 2015.09.21. ~ 2015.11.27.

다) 연장사유 : 통합지주 제작업체의 지주제작 소요기간(3주정도)으로

인한 공사기간의 연장.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	(주)벽슬이앤지 대표자 오춘희,(주)영호이앤씨 대표자 서태교
주무관	박태진		기전과장	10/29 박재경
협조자
시행	기전과-13634	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동)	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개