문서번호	급수운영과-28766
결재일자	2015.10.29.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
박상열	김태형	최명익		10/29 홍현구
협 조

설계변경 및 계약금액 검토보고

(자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사)

2015.10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

설계변경 및 계약금액 검토보고

「자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사」의 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경 및 계약금액 조정 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

❍ 설계변경 승인 요청

- 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처-17388(`15.10.27)

Ⅱ		공사현황

❍ 공 사 명：자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

❍ 공사기간：2015. 5. 1. ~ 10. 31.

❍ 도 급 비：*************

❍ 공사개요 : D=20~300mm, L=2,258m

❍ 도 급 자 : **************

❍ 발 주 청：동부수도사업소(급수운영과)

Ⅲ		보고내용 (설계변경 사유)

❍ 밸브 추가구매

- 관련근거 : 공사감독2처-5735(`15.05.19), 급수운영과-12586(`15.05.26)

- 내     용 : 단수시간 및 단수지역 최소화를 위한 분기밸브 추가설치

❍ 확인굴착 물량증가

- 관련근거 : 공사감독2처-8598(15.06.23)

- 내     용 : 노선결정을 위한 추가 확인굴착 등 물량증가

❍ 작업시간 변경(주간→야간)

- 관련근거 : 급수운영과-12520(`15.05.26)호 및 공사감독2처-14398(15.09.11)            · 서울특별시 광진구 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제4조(교통소통대책의 수립 등)

- 내     용 : 자양번영로(2구간) 공사착공을 위하여 관할경찰서(광진경찰서)에 도로점용

공사 신고서 제출(`15.05.11) 결과, 공사로 인한 교통혼잡 및 민원불편 최소화를 위하여 상가밀집지역(440m)의 작업시간을 야간으로 변경토록 이행조건 부여

※ 교통소통대책수립 용역 추진계획 수립 후 용역시행 (`15.06.10.~08.10)

⇒ 상기 혼잡구간 야간 적용

❍ 실시공 (주요)수량 정산 내용

공종명	규격	단위	수 량		비고(증,감)
			계 약	변 경
터 파 기 (주간)	굴삭기 0.4	㎥	1 137	701	감) 436㎥
터 파 기 (야간)	굴삭기 0.4	㎥	974	1,599	증) 625㎥
부 설 공	D20~300mm	m	2,258	2,396	증) 138m
원형밸브실 설치	-	개소	53	50	감) 3개소
중형밸브실 설치	-	개소	11	13	증) 2개소

❍ 건강 및 노인장기요양보험료, 연금, 퇴직공제부금 실납부 금액 정산 반영

❍ 공사금액 변경 내역

(단위 : 원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증·감	비 고
도 급 비	***********	***********	**************
공급가액	***********	***********	**************
부가가치세	**********	**********	**************

Ⅳ		조치의견

❍ 본 공사는 설계변경 심사 제외대상으로 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 설계변경의 적정성 및 신규공종 단가적용, 물량 증감 등을 검토하고 의결한 내용에 따라 변경계약 및 정산 및 준공 시행에 만전을 기하고자 합니다.

※ 설계변경 심사대상 : 도급비 10%이상 증가시【재무회계과-563(‘13.1.15)

붙 임 :  1. 설계변경 내역서 및 보고서 각 1부.

2. 설계변경 심의 의결서 1부.  끝.