서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업 신속 추진 협조요청

1. 도시기반시설본부 건축부-11656호(‘15.10.15), 12079호(‘15.10.26)와 관련임.

2. 우리 시에서 역점으로 추진하는 “마포 석유비축기지 재생 및 공원화사업”이 계약심사 등 각종 절차이행에 많은 기간이 소요됨에 따라 당초 금년 10월말 착공 계획에서 상당기간 지연이 불가피할 것으로 예상되어 대책마련을 위해 협조를 요청하니,

3. 공사 발주기간 단축(긴급공고 등)과 신속한 착공 및 차질없는 시공을 통해 예정된 준공기일(‘17년 4월)에 성공적으로 마무리되어, 대상지를 염두하고 계획되는 주요행사(도시건축비엔날레 등)에 지장이 없도록 각별한 관심과 함께 세심하게 사업이 관리될 수 있도록 조치(협조)하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	박철수		생활공원팀장	유영봉		공원조성과장	10/29 오순환
협조자	주무관	양지윤
시행	공원조성과-13973	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21(무교동, 더익스체인지서울 9층)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02)2133-2067	/전송	02)2133-1081	/	pcskgb@seoul.go.kr	/	대시민공개