문서번호	현장민원과-16512
결재일자	2015.10.29.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		현장민원과장	북부수도사업소장
오인택		한병주	10/29 박용진
협 조
	주무관			한경란

벽체형 PE보온재 설치공사 준공기한 연기

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

북부수도사업소

(현장민원과)

벽체형 PE보온재 설치공사 준공기한 연기

『벽체형 PE보온재 설치공사』는 공사 자재(보온재)가 납품되어야 시행이 가능하나, 별도 구매 계약한 보온재 납품이 지연됨에 따라 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 함.

1		계약내용

벽체형 PE보온재 설치공사

공사기간 : ‘15. 10. 13 ~ ’15. 10. 30

공사내용 : 벽체형 보온재 4,790개소 설치

계약금액 : 금22,499,460원

계약자   :*******************

벽체형 PE보온재 구매계약

납품기간 : ‘15. 09. 22 ~ ’15. 10. 22

계약내역 : 벽체형 보온재 4,790 납품

계약금액 : 금52,690천원

계약자   : ****************

2		공사 연기

사유 : 보온재 설치공사에 소요되는 보온재의 조기 납품이 가능할

것으로 판단되어 공사착공을 ‘15.10.13로 계약하였으나,

8개 수도사업소에서 동시에 발주함에 따라 보온재 납품물량이

많아져 우리사업소 납품이 늦어짐에 따라 착공이 불가하므로

보온재 남품이 완료된 이후 공사 시행이 가능한 시기로 준공

기한을 연기하고자 함

※ 준공기한 변경내용

건 명	공사기간		비 고
벽체형 보온재 설치공사	변 경 전	변 경 후	계약금액은 변동없음
	‘15.10.13 ~ ‘15.10.30	‘15.10.13 ~ 2015.11.10

귀책소재 : 북부수도사업소

지체상금 부과 여부 : 미부과(지방자치단체 공사·용역 계약일반

조건 Ⅷ-1-다)

3		행정사항

계약부서에 변경계약 요청

- 공사기간 변경에 따라 계약서 변경 재계약 조치.

붙임 1) 합의서 1부

2) 보온재 납품일 확인자료(납품사진 포함) 1부. 끝.