투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경(정산)시행(석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계)

1.우리부에서 시행중인 「석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가.용역명 : 석촌지하차도 상부 교통체계개선 기본 및 실시설계용역

나.계약금액 : 131,590,000원

다.계약자 : ㈜대한콘설탄트 대표  신정언

라.계약기간 : 2014. 6.27. ~ 2015.10.30.

마.설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비고
계약금액	131,590,000	129,390,000	(감)2,200,000
용역기간	2014. 6. 27.~ 2015.10.30.	2014. 6. 27.~ 2015.10.30.

바.설계변경(정산)사유 : 설계자문비 자문위원 실참석 정산

사.예산과목 : 도시교통본부(교통운영과), 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 도로교통소통개선사업, 시설비(401-01)

붙임 : 1)설계변경사유서 1부.

2)방침서 1부.

3)변경설계(정산)내역서 1부.

4)합의각서 1부.  끝.

주무관	윤원섭		토목설계과장	代윤원섭		토목부장	10/29 노우성
협조자
시행	토목부-22756	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개