함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	선금 정산(마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사- 1차기성)

『마천동5~거마가압장간 송배수관 정비공사』에 대한 1회 기성검사조서가 송부 되었기에 기성검사금액 대하여  선금 정산 후 대금을 지출하고자 합니다.

1. 선금지출현황

- 계 약 자 : (합)목우공영  대표: 오영미

- 계약금액 : 1,026,317,970원

- 계약기간 : 2015.7.22.~2016.1.17

- 선금지출 : 275,000,000원(계약금액에서 노무비 제외후 37.6%, 지출일:9.21일)

2. 금회(1회)기성 금액 : 309,100,000원(30.2%기성)

3. 선금정산액

○ 금회정산액(선금정산) : 선금×기성금액÷계약금액

- 산출내역: 275,000,000원×309,100,000원/1,026,317,970원= 82,822,770원

4. 선금정산후 공사대금= 금회기성 - 선금정산

- 산출내역 : 309,100,000원- 82,822,770원 = 226,277,230원

5. 최종 공사대금 지출액 = 선금정산후 공사대금 - 기지급 노무비(‘15.9월)

- 226,277,230원 – 25,419,900원 = 200,857,330원.  끝

주무관	박성희		행정관리팀장	권혁명		행정지원과장	10/29 장성만
협조자
시행	행정지원과-17793	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-5013	/전송	02-3146-5078	/		/	부분공개