투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행[북악터널 LED등기구 교체공사]

1. 기전과-10842(2015.10.28)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진중인 북악터널 LED등기구 교체공사 계약건에 대하여 공사완료 후 보험료 및 이에따른 제경비 정산으로 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 북악터널 LED등기구 교체공사

나. 계약기간 : 2015. 8. 17 ~ 2015. 10. 30

다. 계약업체 : 성진전업 대표 박성국

라. 계약금액 : 금48,529,736원

마. 설계변경 내용

❍ 계약금액 변경                                             (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도급비	48,529,736	46,734,950	(감)1,794,786	-

❍ 설계변경 사유

- 보험료 및 제경비 정산에 따른 설계변경 필요

바. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도시개발특별회계, 도로시설분야조명설비개선공사, 시설비

붙임 :  1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서(갑지) 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

★주무관	백윤광		기전과장	10/29 이영목
협조자	관리단속과장	정수현
시행	기전과-10868	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 913 (번동 365-1) 북부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5473	/전송	02-945-5074	/	byk2011@seoul.go.kr	/	대시민공개