문서번호	토목부-22718
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		권혁대	10/29 노우성
협조

서빙고 고가교  임시개통 계획

2015.10.

도시기반시설본부

(토목부)

서빙고 고가교 임시개통 계획

시민불편을 최소화하고 편리한 교통환경을 신속히 제공하기 위해 “서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사”가 완료된 구간에 대하여 준공에 앞서 ‘15년 10월 31일(토) 04:00 임시개통을 하고자 함

1		사업개요

❍ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(두무개길 ~ 강변북로)

❍ 규    모

- 기존 고가 철거 : B=16m, L=510m(PSC BEAM)

- 신설 고가 설치 : B=6.4~10.4m, L=405, 옹벽208m

- 기존 고가 보수․보강 : B=6.5~16m, L=410m

❍ 공사기간 : 2011.01.06. ∼ 2015.12.31.(공기연장 예정 ‘16.04.30)

❍ 도 급 비 : 20,221백만원

❍ 시 공 사 : ㈜흥화외 1	❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술외 1

❍ 공 정 율 : 87.7%

2		주요 추진현황

❍ 기존 고가 철거(B=16m, L=510m)

- PSC BEAM : B=16m, L=510m

❍ 신설 고가 설치(ST.BOX, B=6.4~10.4m, L=613m)

- 강변북로 구간 : B=6.4m, L=115m, 보강토 옹벽 : 87m

- 두무개길 구간 : B=10.4m, L=290m, 보강토 옹벽 : 121m

❍ 기존 고가 보수․보강 (ST.BOX, B=6.5~10.4m, L=410m)

- 강교 도장, 슬라브 및 교각 단면 보수, 강재 방호책 설치

❍ 개통관련 공종 완료 예정일 : 2015.10. 30.

3		개통전 시설물 합동점검 시행

❍ 점검일시 : 2015.10.26.~27.(2일간)

❍ 점 검 자

- 토목부 : 터널건설과장외 1명

- 설비부 : 환경설비과장외 1명

- 감리단, 시공사

❍ 주요 점검내용

- 교량 시설물 : 교량 안전시설(방호책) 설치상태, 신축이음장치 및 교좌장치 설치 상태

- 아스팔트 포장 : 포장의 평탄성 및 시공상태 점검

- 부대시설물 : 교통 및 안내표지판의 설치, 차선도색 설치상태

- 전기시설물 : 조명시설 설치 및 점등상태

❍ 점검결과

- 토목분야 : 특이사항 없음

- 전기분야 : 특이사항 없음

- 교통분야 : 특이사항 없음

4		개통계획

❍ 일 시 : 2015.10.31.(토) 04:00

❍ 구 간 : 강변북로 ~ 한남동(총연장 1,023m)

❍ 통과 교통량(2015년 기준) : 27,140대/일

❍ 개통 구간

- 강변북로(반포대교 북단) → 서빙고로(한남동 방면)

- 서빙고로(한남동) → 강변북로(일산방면)

❍ 개통구간 사진현황

5		향후계획

❍ 2015.11 ~ 2016. 2. : 임시 가설교량 철거

❍ 2016. 3.	: 강변북로 종점부 시공완료 및 서빙고로 복원

❍ 2016. 4.	: 공사 준공

6		행정사항

❍ 개통에 따른 홍보실시

- 언론담당관 보도자료 제출(29일) : 언론보도(30일 조간)

- 관련기관 홍보(경찰청, 교통방송, 자치구, 네비게이션 업체 등)

❍ 개통후 모니터링 실시

- 교통분야 : 서울지방경찰청

- 토목분야 : 토목부

- 전기분야 : 설비부

붙 임 : 개통토 1부.  끝.