문서번호	시설과-171
결재일자	2014.1.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	관리부장
최강욱		이윤권	01/10 정상택
협조
	시설과장		공헌구

공동구내 소방시설 구축 설계용역 시행계획

서 울 대 공 원

(기반시설 안전추진반)

공동구내 소방시설 구축 설계용역 시행계획

서울대공원 공동구내 소방시설 구축관련 설계용역 추진계획임

Ⅰ		용역의 필요성

공동구내에 합리적인 소방시설 구축을 위한 설계용역 실시

— 추진근거 : 소방시설공사업법 제11조(설계)

⇒ 소방시설설계업을 등록한 자가 화재안전규정 등 소방관련 법규에 맞게 소방시설을 설계하여야 함

Ⅱ		과 업 내 용

소방시설 설계

— 화재안전기준 등 소방법규에 따른 공동구내 소방시설 설계

․ 소화설비(소화기구), 자동화재탐지설비(화재감지기, 발신기, 수신반) 등

— 기타 소방시설 개선사항

설계도서 납품

— 설계설명서, 설계도면, 공사시방서, 공사비내역서 등

Ⅲ		소요예산

소요예산 : 42,440천원

— (지식경제부고시 제2012-178호) 엔지니어링사업대가의 기준 제13조(요율)에 따른 공사비요율에 의한 방식으로 산출

예산과목 : 일반회계, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비

Ⅳ		추진일정

‘14.01. : 기술용역타당성심사 요청(기술심사담당관)

‘14.01. : 설계용역 발주 및 계약

— 계약방법 : 전자공개수의계약

‘14.02. ~ 04. : 설계용역 착수 및 완료

— ‘14.03. : 설계용역중간보고회 개최