문서번호	방재시설부-14435
결재일자	2015.10.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		공원시설과장	방재시설부장
전지홍		김인숙	10/29 임춘근
협 조
	주무관			임성은

「경의선숲길 공원조성공사(2단계)」

관급자재(산석 등 3종) 변경계약 검토보고

2015. 10.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「경의선숲길 공원조성공사(2단계)」

관급자재(산석 등 3종)  변경계약 검토보고

「경의선숲길 공원조성공사(2단계) 2차」에 필요한 산석 등 3종 물량 반영을 위한 관급자재의 변경계약 검토보고임

▶ 관련근거 : 경의경춘(감)-801호

1		개 요

□ 건    명 : 경의선숲길 공원조성공사 관급자재(산석 등 3종)구매

□ 구매물량 : 산석 349.29t 등 3종

□ 계 약 자 : ㈜조경석재 대표 ***

□ 계약기간 : ’16. 5. 30까지

□ 계약금액 : 76,080천원

2		보 고 내 용

□ 물량변경 및 금액

자 재 명	규 격	수량	단위	재 료 비		증 감		비고
				단가	금액(원)	수량	금액(원)
산 석	T150	349.29	ton	125,570	43,860,340	108.71	13,650,720	당초
		458		125,570	57,511,060			변경
보 령 석	D150~300	96.50	ton	132,340	12,770,810	변경없음	변경없음	당초
		96.50		132,340	12,770,810			변경
자연석 (디딤돌)	T100	236.86	㎡	82,112	19,449,040	207.14	17,008,680	당초
		444		82,112	36,457,720			변경
합 계					76,080,190		30,659,400	당초
					106,739,590			변경

※ 부가세 포함

□ 변경사유

○ 2차공사 수량 반영(와우교 및 신수동구간)

○ 와우교구간 철거 지연에 따른 설계변경 수량 및 신수동구간 자연석판석 수량 반영

3		보고자 의견

□ 경의선숲길 공원조성공사 2단계(2차분) 공사 추진에 필요한 관급자재로 원활한 공정추진을 위해 기 계약건에 해당물량 반영코자하는 변경계약 건이며,

□ 증액되는 금액은 추후 시 공원조성과에 예산배정 요청코자함

붙  임 : 감리단 공문 1부.  끝.