“10월 28일 새로운 서울브랜드가 탄생합니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 교통사망사고지점(수색역교차로) 개선계획 변경에 따른 예산 재배정(감) 및 협조 요청

1. 교통운영과-18087(’15.9.16, ’15년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산재배정 및 사업추진 협조요청), 및 은평구 교통행정과-42324(’15.10.13), 도로교통공단 안전시설부-6934(’15.10.20)호와 관련입니다.

2. 은평구청에서 요청하신 “2014년 교통사망사고지점(수색역교차로) 개선사업”관련  하수관로 이설, 차도 및 보도공사 등 예산 추가지원에 대하여 현장점검 결과 하수관로 이설 및 횡단보도 신설 등에 따른 진출입로 폐쇄 민원과 사업예산의 부족 등으로 부득이 따로 붙임과 같이 사업계획 변경 및 사업예산을 감 재배정하오니,

3. 금년내 개선사업을 완료하여 교통사고가 사전에 예방될 수 있도록 사업추진에  만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 예산 재배정(변경)내역 -

(단위 : 원)

예산과목			재배정부서		예산 재배정(변경)		금회재배정액 (감·증액)		비 고 (사 유)
부서 정책 단위	세부사업	통계목			당 초	변 경
합 계					106,315,000	18,003,000	(감)88,312,000
도시교통본부 (교통운영과) 도시교통체계 및 소통개선 교통소통 및 안전관리강화	교통 사고 잦은 곳 개선	시설비 (401-01)	서부도로	도로 보수과	16,400,000	9,874,000	감	6,526,000	[수색역교차로] 보행자 무단횡단으로 인한 교통사망사고가 주원인으로서 보행자방호울타리 및 무단횡단금지시설을 보강하고, 횡단보도 신설은 추후 재검토하여 개선 계획임
				기전과	18,050,000	0	감	18,050,000
			은평 구청	교통 행정과	71,865,000	8,129,000	감	63,736,000

붙임 : 2014년 교통사망사고 지점 개선 변경시행 보고 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 서부도로사업소장(도로보수과장),서울특별시 서부도로사업소장(기전과장),은평구청장(교통행정과장)
주무관	박종현		교통안전팀장	김세교		교통운영과장	10/29 강진동
협조자	주무관	김수정
시행	교통운영과-21089	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 제1별관 6층 교통운영과	/
전화	02-2133-2446	/전송	02-2133-1053	/	asd4041@seoul.go.kr	/	대시민공개