문서번호	정보통신보안담당관-18238
결재일자	2015.10.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
실무사무관		통신망관리팀장	정보통신보안담당관
이복수		이명원	10/07 박웅수
협조

e-Seoul Net 구조 개선계획

2015. 10.

정보통신보안담당관

e-Seoul Net 구조 개선계획

서울시, 자치구 등 35기관에서 행정․민원정보 유통에 필요한  e-Seoul Net의 장애예방을 위한 서브링 연결노드 이중화 및 내용연수 경과 노후화된 엑세스장비를 교체하여 안정적으로 통신서비스 제공

Ⅰ				운영현황

□ e-Seoul Net 시설물

구 분	광 선 로 설 비			광 전 송 장 비
	광케이블	통신관로	인·수공	메인링	서브링
수 량	220km	26m	177개	7대	29대

□ 구성도

	◀ 메인링(20Gbps) : 1개 - 시청(본관․서소문), 영등포 등 6개기관 ◀ 서브링(10Gbps) : 6개 - 중구, 용산, 강서 등 29개 기관

Ⅱ				문 제 점

□ 서브링 연계기관 통신망 안정성 취약

○ 메인링의 백본장비는 서브링을 연계하는 통신장비로서 메인링 백본장비 장애시          서브링에 연결된 기관도 동시에 통신이 두절되는 문제점이 있어 개선필요

□ 엑세스 장비 노후화

○ 내용연수 6년을 초과하여 운영중인 장비가 49%(136대)로 단계적 교체필요

- 엑세스장비 현황

총 계	내용연수(6년) 초과	내용연수(6년) 미경과	금회 교체
277대	136대	141대	3대

Ⅲ				개선(안)

□ 서브링 노드 접속개소 이중화

○ 서브링 연계기관을 메인링 백본장비 2개소와 연계될 수 있도록 접속개소              이중화 구성하여 메인링 장애시에도 서브링 연결기관 무중단 서비스 운영

<변경 구성도>

기 존	개 선 후
송파구 백본장애시 서브링연결 구간은 통신단절	송파구 백본장애시 강북구 링 우회를 통해 송파서브링 연결구간 통신가능

○ 필요 시설물품

- 광코어 : 10Core(메인링 기관 5개소 접속)

- GBIC :  4개[XENPAK(ER 2개, LR 2개)]

□ 노후 엑세스 장비 교체

○ 내용연수 초과장비 중 장애발생 빈도가 있는 스위치 장비 교체(‘04년도 3대)

※ 내용연수 경과된 장비는 향후 예산확보 후 점차적으로 교체예정

Ⅳ				구매계획

□ 건    명 : e-Seoul Net 구조 개선 인터페이스 장비 구매설치

□ 기    간 : ‘15. 10. ~ 11월

○ 환경조사 및 인터페이스 연결테스트  : 10. 8 ~ 26

○ 개선작업 및 모니터링               : 11. 18

□ 소요예산 : 21,978천원

○ 인터페이스 장비 :   9,438천원

- 광 점퍼코드   :     528천원(1식)

- 광 레벨측정   :     990천원(12Core, 1식)

- GBIC 모듈   :   7,920천원(10G 4개)

○ L3 스위치      : 12,540천원(48Port 2대, 24Port 1대)

□ 예산과목 : 정보통신인프라구축, 초고속정보통신망 안정적운영, 자산취득비

□ 계약방법 : 수의계약

○ 근     거 : 지방자치단체를당사자로하는계약관한법률시행령 제25조1항5호

○ 사    유

- 행정정보 및 인터넷 등을 서비스하고 있는 e-Seoul Net 의 구조를 변경  하는 고도의 기술이 필요한 사업임을 고려하여,

- 통신망 현황과 기술력을 확보하고 있는 ‘15년 현재 유지보수 용역사업 업체와 계약하여 신속하고 안정적으로 사업을 수행하고자 함.

□*****************

Ⅴ				추진일정

□ 설계도서 작성 및 계약     : 10. 6 ~  10.14

□ 장비납품, 설치 및 준공    : 10.16 ~ 12. 7

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.