문서번호	기획관리과-9607
결재일자	2015.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	10/16 이계헌
협조

ICT교육장 리모델링 설계용역 시행 계획

2015. 10.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

ICT교육장 리모델링 설계용역 시행 계획

우리 센터 ICT교육장 리모델링 및 보안시설 공사에 대한 설계용역을 시행하여 청사 내 물리적 보안을 강화하고 청사 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□  추진근거

○ 데이터센터 물리적 보안강화 계획 (정보기획관 방침, ′15. 10. 5.)

□  용역개요

○ 용 역 명 : 데이터센터 ICT교육장 리모델링 설계용역

○ 용역기간 : ′15. 10. 20 ~ 11. 30 (40일간)

○ 용역범위

- 구(舊 ) 식당(240.40㎡)을 ICT교육장으로 리모델링

- 데이터센터 출입관리시스템 구축

	< 세부내용 >
‧ 1층 비상계단 위치의 기존 방화문을 철거하고 일방향(피난방향) 개폐식 방화문 신설 ‧ 지상1층 스피드게이트(SpeedGate) 설치 (부대 장비‧시설 포함) ‧ 4층 각 부서(실) 방화문(7개소) 철거 후 강화유리도어 설치 (각 부서 : 전자태그 출입시스템 설치 3개소 포함) ‧ 각 부서, 휴게실(실명 : 소나무), 세미나실 등과 조화되도록 4층 복도 공간 재구성(서고포함)

○ 과업내용 : “붙임 과업내용서” 참조

□ 계약방법 _ 수의계약

○ 용역업체 : 현인종합건축사사무소 대표 김원운

(주소 : 서울특별시 관악구 봉천로 436-1)

○ 수의계약 사유

- 관공서 설계 경험 다수 보유

- 용역 금액이 2천만원 이하의 소액으로 관련 규정에 의거 수의계약 추진

□ 소요예산 : 11,000천원

○ 산출기준

- 공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준

(국토해양부 고시 제2011-750호, `11. 12. 8.)

○ 예산과목

- 정보서비스 물적 인프라 관리, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 시설비

□  추진일정

○ 설계용역 계약 및 착수                      ′15. 10. 20.

○ 설계용역 완료                              ′15. 11. 30.

○ 공사발주                                   ′16. 01월

○ 공사완료 및 준공                           ′16. 03월

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 설계비용역비 산출서 1부.  끝.