문서번호	시설과-5470
결재일자	2015.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	임록화	代임록화	10/29 이춘희
협 조
	주무관		代지정희

「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

2015. 10

동부공원녹지사업소

(시설과)

「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업 」

실정사항 검토 및 설계변경 보고

우리사업소에서 추진 중인「보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업」과 관련하여 실정사항 및 설계변경 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보건환경연구원 옥상녹화·텃밭조성 사업

○ 위    치 : 과천시 장군마을 3길 30(주암동)

○ 공사내용 : 식재기반, 수목식재, 휴게시설설치, 데크공사 등

○ 공사기간 : 2015. 08. 12 ~ 10. 31

○ 총공사비 : 금189,599,210원(일억팔천구백오십구만구천이백일십원)

도급액 : 금149,620,210원/ 관급자재 39,979,000원

○ 도 급 자 : ㈜다원녹화건설 대표 김용각

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 천원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
기반	▷ 담수시험 결과 당초 설계시 대상구간이 아닌 곳에서 누수가 발생하여 냉각탑 경계부 철거하고 추가 방수 공사 필요	▷ 철거공사 • 냉각탑 구조물 철거 및 면정리(신규) • 폐기물 운반 및 처리 : 방수시트 철거 : 1.657TON -> 4.9TON 냉각탑 구조물 철거 : 0TON -> 2.415TON 총폐기물 : 1.657TON -> 7.315TON ▷ 방수방근 • 방수시트(바닥) : 669㎡ -> 726㎡ • 방근시트(바닥) : 609㎡ -> 666㎡	증 3,078
시설	▷ 플랜터, 텃밭상자의 스텐레스 판의 휘어짐 현상에 따라 지지대 보강	• 플랜터 A : 1개소 -> 0개소 • 플랜터 A-1 : 0개소 -> 1개소 • 플랜터 B : 1개소 -> 0개소 • 플랜터 B-1 : 0개소 -> 1개소 • 텃밭상자 : 21개소 -> 0개소 • 텃밭상자-1 : 0개소 -> 21개소	증 259
	▷ 식재수종 중 수목명찰이 없는 수종이 있어 추가설치 필요	• 수목명찰(목재) : 24EA -> 0EA • 수목명찰(알루미늄) : 0EA -> 58EA	감 111

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
시설	▷ 미관을 고려하여 냉각탑 주위 차폐 시설 추가 설치	▷ 냉각탑 주위 트랠리스B 설치 • 트랠리스 B : 0개소 -> 1개소	증2,073
	▷ 농기구 보관함을 현장에 맞게 변경 필요	▷ 차폐시설과 연계하여 현장에 맞게 농기구 보관함 변경	증576
	▷ 미관을 고려하여 실외기 주변 차폐 시설 추가 설치 ▷ 트랠리스 창살 간격(100mm)이 넓어 차폐효과가 떨어지므로 창살 간격 보완	▷ 실외기 주변 트랠리스A 설치 (창살간격 100mm -> 50mm) • 트랠리스 : 43m -> 0m • 트랠리스A : 0m -> 57m • 트랠리스 출입문 : 5개 -> 0개 • 트랠리스 출입문A : 0개 -> 5개	증2,698
식재	▷ 식재환경 및 생육환경을 고려하여 식재 수량 조정	▷ 관목 • 블루베리 : 80주 -> 55주 ▷ 초화류 • 구절초 등 6종 : 1,830본 -> 1,285본	감1,224
양중	▷추가 자재 반입 양중	• 양중 : 2일 -> 2.5일	증 296
관급	▷ 관급자재로 계약된 종합안내판이 도면과 상이하여 도면에 맞춰 변경 계약 필요	▷ 도면에 맞춰 변경계약	감 53

□ 소요예산 내역(증 10,542천원)

(단위 : 원)

구 분	소요 금액			비고
	당 초	변경	증 / 감
총 공 사 비	189,599,210	200,141,990	10,542,780
공 급 가 액	136,018,373	145.650,900	9,632,527
부 가 가 치 세	13,601,837	14,565,090	963,253
도 급 공 사 비	149,620,210	160,215,990	10,595,780
관급자재비	39,979,000	39,926,000	-53,000

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구분	예산액	구조안전 용역	실시설계 용역	공사비집행액				비고
		계약액 (준공)	계약액 (준공)	발주액 (a)	계약액 (b)	잔액 (c=a-b)	관급자재
보건환경 연구원	229,600,000	5,420,000	12,390,000	170,521,000	149,620,210	20,900,790	39,979,000

‣ 예산과목

- 조경과, 생활주변녹지확충 및 시민참여활성화, 시민참여 녹지조성, 옥상녹화        텃밭 조성, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 설계 변경 시행코자 함.

○ 예산 조치사항

- 공사비 증액분(10,542천원)은 공사 낙찰차액을 활용하여 예산집행

- 공계약담당부서에 설계변경 시행 의뢰

붙  임 : 1. 실정사항 보고 및 공문 1부.

2. 변경내역서 1부.