문서번호	토목부-22863
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
홍상필		代강철규	10/30 노우성
협조

보조감리원 투입기간 연장 보고

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.10.

도시기반시설본부

(토목부)

보조감리원 투입기간 연장 보고

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사」

2015.10.31. 서빙고고가교 본선 개통 후 주요 잔여 공종인 임시 가설교량 철거 구간중 경원선 횡단구간은 야간(01:00~04:30)공사가 불가피한 실정으로 현재 배치되어 있는 안전분야 보조감리원을 연장배치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

1		관련근거

❍ 한종(서빙고)제15-206호(2015.10.26.) 안전분야 전담감리원 연장 투입보고

2		용역개요

❍ 용역명 : 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사외 1건 통합전면책임감리용역

❍ 규    모

- 기존 고가 철거 B=16.0, L=753m,

- 고가설치 : B=6.4~10.4m, L=115~290m,

- 기존고가 보수․보강 : B=16.0m, L=140m

❍ 용역기간 : 2010.12.31. ∼ 2016. 1.31

❍ 용역비 : 2,035백만원

❍ 감 리 사 : ㈜한국종합기술외 1개사

3		감리단 보고내용

❍ 임시 가설교량 철거가 경원선 횡단부 양방향에서 철거예정으로 철도보호지구내 야간        공사(01:00~04:30) 시행이 불가피한 실정임

❍ 또한, 임시 가설교량은 중량물로 크레인을 이용하여 철거함에 따라 철저한 안전관리가        요구되어 철거 초기시 현장 안전관리 지도·확립이 필요함에 따라 현재 배치되어 있는        안전분야 보조감리원의 배치기간을 1개월 연장배치하여 현장 안전관리에 만전을         기하고자 함

❍ 안전감리원 투입기간 변경계획(안)

성 명	등 급	투 입 기 간			비 고
		당 초	변 경	추가금액
최 형 출	감리사보	‘15. 4. 1. ~‘15. 10. 31.	‘15. 4. 1. ~‘15. 11.30.	없음	전기보조감리원의 투입계획 조정

4		조치의견

❍ 임시 가설교량 철거 초기 현장 안전관리 지도·확립이 필요함으로 보조감리원(전기)        투입계획을 조정하여 감리비 증액없이 안전감리원의 투입기간을 1개월 연장하여        승인하고자 함

붙 임 : 1. 안전분야 전담감리원 연장투입계획 보고 공문 1부.

2. 안전감리투입계획 1부.  끝.