문서번호	시설보수과-8527
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		10/30 代윤동원
협조

- 외발산지하차도 외4개소 정밀점검용역(하자점검) -

설계변경 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

시설보수과

- 외발산지하차도 외4개소 정밀점검용역(하자점검) -

설계변경 보고서

1. 용역개요

❍ 용 역 명 : 외발산지하차도 외4개소 정밀점검용역(하자점검)

❍ 용역규모 : 교량3개소, 지하차도 2개소

❍ 용역기간 : 2015. 5. 8 ~ 11. 3

❍ 용 역 사 : 비앤티엔지니어링(주) 대표 이상민

❍ 용 역 비 : 104,696,000원

2. 설계변경 주요내용

❍ 본 용역 기간중 자문회의 미반영에 따른 변경(감)

▶ 자문회의 당초 : 6인 → 변경 : 0인

3. 용역비 변경내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 용역비	104,696,000	103,904,000	(감) 792,000

4. 조치의견

❍ 상기 내용과 같이 설계변경을 시행하고 용역사로 하여금 재계약        토록 통보하고자 함.

붙 임  설계변경 내역서 1부.   끝.