함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 계약변경 의뢰(양천길 교량 기본 및 실시설계 용역)

1. 도로계획과-15660호(2013.12.17.)와 관련입니다.

2. 『양천길 교량 기본 및 실시설계용역』 설계변경에 따른 용역 계약변경을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 양천길 교량 기본 및 실시설계용역

나. 계약기간 : ‘09. 11. 16 ~ ’14. 2. 28

다. 계 약 자 : ㈜동호컨소시엄 대표 오준미

라. 변경내역

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
계약금액	2,650,000	1,102,800	감 1,547,200

마. 변경사유 : 설계변경에 따른 용역비 감액

바. 예산과목 : 세입세출외 현금(SH공사 전액부담)

붙임 : 1. 설계용역 타절 준공처리 검토보고 1부.

2. 설계변경(정산) 시행 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	신대식		간선도로계획팀장	김기용		도로계획과장	01/10 형태경
협조자
시행	도로계획과-438	(		)	접수		(		)
우	100-101	서울시 중구 세종대로 110 서울특별시청 10층	/
전화	2133-8077	/전송	2133-0763	/	sds9561@seoul.go.kr	/	대시민공개