함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	전기관로 하월 실정보고 회신 및 추가 지시사항 통보 (동일로 송배수관정비공사)

1. 문서번호 공사감독2처-17464호(2014.10.28.)와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독하는“동부수도사업소 동일로 송배수관정비공사”의 전기관로 하월에 대한 실정보고 및 추가 지시사항과 관련하여 아래와 같이 검토 통보하니 공사감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

- 실정보고 사항과 같이 전기관로 하월하여 관로부설하고 하월 시점부에 공기밸브 설치 및 구형밸브실을 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시고,

- 중곡동238-6번지 앞 기존 1350mm 연결시공은 2016년 잔여구간 공사시행을 고려 할 때 예산낭비를 초래하므로 금번 공사에서 제외하고, 전기관로 하월시공 후 마개플랜지(1000mm)를 설치하여 관로부설을 종결처리 하고,

- 본 공사 예산과 관련하여 본부(급수부 배수과) 지시에 따라 2구간(군자교 부근 연결공사)은 금년 본 공사 대상에서 제외 되었음을 통보하니,

- 추가 및 제외된 공정에 대하여 관리감독을 철저히 시행하여 향후 설계변경 시 반영하고 정산시행에 만전을 기하여 주시기 바람.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	최호림		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	10/30 최명익
협조자
시행	급수운영과-28978	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2742	/전송	02-3146-2789	/	tig2r2000@seoul.go.kr	/	부분공개