서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	경의선숲길 공원조성 사업 협조요청에 대한 회신(와우교 관련)

1. 마포구 토목과-15701호(2015.10.13.)와 관련입니다.

2. 우리시 역점사업인「경의선숲길 공원조성 공사(3단계)」와 귀 청에서 시행 예정인「와우교 보수 및 보강 공사」의 장소적 중첩성으로 인한 공사 연기 및 사업비 재배정 등‘와우교 공사 완료 후 시행 방안 검토 요청’건은

3. 경의선숲길 공원조성 사업은‘투자심사 및 중장기계획에 따라 2016년 5월 개원(예정)’을 목표로 예산 확보 및 투자계획이 기 수립되었을 뿐 만 아니라 공사 연기에 따른 추가 예산 지출 등의 문제가 있으며, 행정 신뢰도 향상 등을 위하여 공원조성 공사의 연기는 불가함을 통보하며

4. 우리 시에서 시공하는 동 지역 공원조성 공사는 와우산로32길(땡땡거리)에서 와우교 이전까지로‘와우교 보수·보강’은 귀 구에서 자체적인 시행방안을 강구하시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	마포구청장(토목과장),마포구청장(공원녹지과장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	최송천		공원개발팀장	代이용남		공원조성과장	10/30 오순환
협조자
시행	공원조성과-14033	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2065	/전송	0221331081	/	csc1969@seoul.go.kr	/	대시민공개