함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 체결 통보[벽체형 보온재 설치공사]

1. 현장민원과-16544(2015.10.30.)호와 관련입니다.

2. 『벽체형 보온재 설치공사』건에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하고 통보 합니다.

가. 건 명 : 벽체형 보온재 설치공사

나. 계약상대자 : (주)효성이엔에스  대표 정수웅

다. 계약 기간  : 2015.10.13. ~ 2015.10.30.

라. 계약 변경 사항 : 준공기한

- 당    초 : 2015. 10. 30.

- 변    경 : 2015. 11. 10.

마. 변경사유

- 공사자재 납품 지연에 따른 절대공기 부족

따로붙임 : 1. 공사 변경계약 체결 통보서 1부.

2. 변경계약 보증서 1부. 끝.

	행정지원과장
주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	10/30 정의석
협조자
시행	행정지원과-20739	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	3146-3245	/전송	02-3146-3279	/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개