문서번호	도로보수과-10693
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이화신		이석재	10/30 노영석
협 조

세종로 돌포장 관련 자문회의 및 시험시공 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부도로사업소

(도로보수과)

세종로 돌포장 관련 자문회의 및 시험시공 계획

광화문광장 차도 도포장 파손에 대한 최적의 보수방안을 마련하고자 아래와 같이 자문회의 및 시험시공 계획을 보고드림

□ 관련근거

〇 세종로 돌포장 관련 자문회의결과 조치계획

- 도로보수과 – 10628(2015.10.27.)

- 내용 : 자문회의회 개최, 자재시험, 현장시공 및 모니터링 실시

□ 세부 추진계획

〇 자문회의 개최

- 일  시 : 2015.11.9.(월) 14:00

- 장  소 : 사업소 회의실

·자문위원 : 김한용(한솔), 문성호(과학기술대), 이진용(케어콘),

강승회(백양건설)

- 자문내용

· 최적의 돌포장 보수자재 및 보수공법 선정

· 자재 시험 항목 (초기강도, 응결시간, 건조수축 발생여부 등)

· 현장시공방법, 성능평가(몰탈건전성, 압축·전단파괴 여부, 붙임상태 등), 및 모니터링 방안 등

〇 자재 품질시험

- 일  시 : 2015.11.12.(목) 오후

- 장  소 : 현장 실험실

- 참 석 자 : 도로포장연구센터 연구원, 제품생산자, 현장소장

- 시험항목 : 초기강도, 응결시간, 건조수축 발생여부 등

〇 현장시공

- 시공목적 : 시공성 평가, 시공방법 평가, 하자 발생 등

- 일    시 : 2015.11.12.(목) 22:00 ~ 익일 06시

- 장    소 : 세종로 시공 현장

- 시공규모 : 약10㎡

- 참 석 자 :  6명

·내    부 : 도로보수과장, 도로연구센터장,

·자문위원 : 김한용(한솔), 문성호(과학기술대), 이진용(케어콘),

강승회(백양건설)

〇 현장시공 모니터링

- 기간 및 방법은 자문의견에 청취후 결정

- 항목 : 몰탈건전성, 압축 및 전단파괴 여부, 석재와 붙임상태  등

□ 행정사항

〇 품질시험 및 시험시공 결과 보고 : 도로관리과

〇 현장시공부 모니터링. 끝.