함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 자양동 796번지외 2개소 배급수관 정비공사

나. 도 급 자 : 대민공영  대표 전인영

다. 공사기간 : 2015.05.01. ~ 10.31.

라. 설계변경 사유 : 신규공종 발생 및 시공물량 증,감 등

마. 설계변경 금액 내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비고
도 급 비	492,201,500원	524,100,000원	증) 31,898,500원
공급가액	447,455,909원	476,454,546원	증) 28,998,637원
부 가 세	44,745,591원	47,645,454원	증) 2,899,863원

바. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비,노후상수도관(배급수관)정비

첨부 :  1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경 심의 의뢰서 및 심의위원 의결서 각 1부.

3. 설계변경 심의 결과보고서 1부.

4. 변경 합의서 및 제비율 검증서 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	박상열		급수설비팀장	代양윤선		급수운영과장	전결 10/30 최명익
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	급수운영과-28913	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	0231462747	/전송	02********9	/	psy0809@seoul.go.kr	/	부분공개