문서번호	설비부-13484
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	열빛총괄과장
지장환	10/30 이달영

『구리암사대교 건설공사』아천IC 교통신호기 설치 설계변경 소위원회 자문요청

2015. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『구리암사대교 건설 공사』 아천IC 교통신호기 설치 공사

설계변경 소위원회 자문 요청서

문서번호	토목부-21469호			요청부서		토목부	요청일자	2015.10.30.
공 사 명	구리암사대교 건설 공사
공사개요	공사규모		L = 2.74km B = 4~6차로 구리암사대교 L = 1.13km, 접속도로 L = 1.61km, IC 2개소(아천,암사)
	공사기간		2006.04.05. ∼ 2016.04.30.
	감 리 사		㈜도화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링 종합 건축사사무소
	설 계 사		㈜도화엔지니어링
	시 공 사		㈜현대건설
심의요청 사유			토목부 설계도서 검토 요청(5,000만원 이상 증액)
□ 설계변경 사유 (요약) 토목부-21469(2015.10.14.)호에 의거 설계변경 자문요청
【주 요 변 경 내 역】
▪ 변경개요 - 교통신호기 설치공사 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 없음 - 변 경 : 교통신호기 설치 25조 - 증 감 : 차량신호등 설치 25조					▪ 직접공사비 증감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 139,982 천원 - 증 감 : 증 139,982 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 교통신호기
별첨서류		설계변경 심의자료 1부.

건 명 : 구리암사대교 건설 공사 아천IC 교통신호기 설치공사

■ 현 황

계 약 명	구리암사대교 건설 공사		시 공 자	㈜현대건설
공 사 규 모	L = 2.74km B = 4~6차로	계 약 금 액	197,939,000 천원				계약일
							2006.04.05
공사기간	2006.04.05. ∼ 2016.04.30.	감리자	㈜도화엔지니어링외 1개사			설계자	(주)현대건설
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )				※ 작성자: 지장환 ☎ 3708-8611

■ 설계변경 개요

(단위 : 천원)

구 분	설 계 변 경 전	설 계 변 경 후
교통신호기	-	▪ 변경개요 - 교통신호기 설치 ▪ 물량 증감내역 - 당 초 : 없음 - 변 경 · 차량신호등 설치 25조 · 와이어없는 지주 11본 · 지주기초 및 앙카 11조 · 기타장치(유무선통신장치, UPS 등)
설계변경금액 (직접공사비)	-	139,982

■ 설계변경 배경

- 구리암사대교 건설 공사 아천IC 미개통 램프 개통방안에 대하여 관계기관협의에 E란 교통신호기 설치

■설계변경세부내용

구 분	내 용	선택항목
설계변경 유형	①설계도서 내용 불분명, 누락, 오류, 상호모순 ②지질,용수등 현장조건 상이 ③신기술,신공법 적용 ④민원수용,보수,보강 ⑤피해건물보상 ⑥정책,계획등 변경 ⑦구조형식 변경 ⑧제도,기준변경 ⑨운반거리 변경 ⑩유관기관 요청	⑩
계약금액 조정 (단위 : 천원)	①증액 : 139,982 ②감액 : ③공사비 변경없음	①
설계변경 효과	①공기단축 ②품질 향상 ③안정성 증진 ④시공성 향상 ⑤비용절감 ⑥시민편익 증진 ⑦민원해소 ⑧설계구조보완 ⑨기능성,사용성 증진	③

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 추진경위

- 토목부-21469(2015.10.14.)호 : 아천IC 교통신호기 설치공사 설계변경 자문요청

- 업무지시(도시기반시설본부15-5802호, 2015.10.19.) : 설계변경 도서 검토

- 암사감리 2015-568(2015.10.29.)호 : 설계변경 자문요청

○ 설계변경 승인절차

- 토목부 설계변경 자문요청 → 설계변경소위원회 상정 → 심의결과 통보(설비부 ‣ 토목부)