투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	(금액,납기)변경계약 체결 알림-레미콘(2처리장 유량조정 및 침전조 설치 공사)

아래와 같이 변경계약 체결하였음을 알려드립니다.

1. 계약건명 : 레미콘(2처리장 유량조정 및 침전조 설치 공사)

2. 계약금액 : 감 금13,051,500원 (조달수수료 : 금66,950원)

- 변 경 : 금4,518,800원(금사백오십일만팔천팔백원)

(조달수수료 별도 : 금23,180원)

- 당 초 : 금17,570,300원(금일천칠백오십칠만삼백원)

(조달수수료 별도 : 금90,130원)

3. 계 약 일 : 2014년  12월  17일

4. 납품기한 : 51일 연장

- 변 경 : 2015년  12월  20일

- 당 초 : 2015년  10월  30일

5. 변경사유 : 사업계획 변경에 따른 물량 감소

6. 계약업체 : 서울경인레콘공업(협) (대표 배조웅)

(☎ 02-539-2651)

붙임 : (변경)분할납품요구및통지서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	정상진		관리과장	한병연		중랑물재생센터소장	10/30 김동기
협조자
시행	관리과-14987	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	jungsj0318@seoul.go.kr	/	대시민공개