문서번호	방재시설부-14484
결재일자	2015.10.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	10/30 임춘근
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』원효동구간

마사토포장 개선 실정보고 검토

2015. 10

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』- 원효동구간

마사토포장 개선 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 원효동구간 포장(마사토포장) 개선에 대한 건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–819(2015.10.20)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 12,244백만원

Ⅱ

검토내용

○ 실정보고 사유

- 원효동구간 공원조성 계획고는 종단경사가 1.6%~3.4%로 설계되어 마사토     포장 시공 시 강우에 의한 경사 포장면 쇄굴 및 마사토 유실이 우려됨.

- 공원조성계획도

○ 마사토포장 개선방안

- 유지관리에 용이한 반경화 마사토포장으로 변경 적용

○ 주요수량 변경현황

공 종		단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
포장공	마사토포장	㎡	417.24	-	감) 417.24
	반경화포장	㎡	87.37	504.61	증) 417.24

○ 개략 공사비 변경현황

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감
1. 순공사비	9	14	증) 5
1) 마사토포장	6	-	감) 6	자재 별도
2) 반경화포장	3	14	증) 11	자재 포함
2. 제경비	4	6	증) 2
3. 도급액	13	20	증) 7

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 경의선숲길 공원조성공사-원효동구간 마사토포장 개선과 관련하여 공원조성 계획종단경사를 고려하여 강우 시 쇄굴 및 마사토 유실을 방지코자 반경화포장으로 변경 적용함은 타당하다고 판단됨.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 - 원효동 구간 마사토포장 변경에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보코자 하며 차후 설계 변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.